투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경계약 의뢰(강남순환 8공구 구룡지하차도 전기공사)

우리 본부에서 시행하고 있는 『강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사』에 소요되는 관급자재에 대해 공기연장에 따른 현장설치 시기가 미도래하여 아래와 같이 납품기한 연기요청을 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

품 명	납품요구번호 (계약 번호)	계약 금액	납 품 기 한		비 고
			당 초	변 경
도로조명설비	12-17-1-64993-00 (12162091009)	34,790,000원	’18.07.31.	’22.12.31.	증)1,614일
가로등주 및 부속자재	12-13-1-01622-00 (00115108703)	80,450,000원	’18.07.31.	’22.12.31.	증)1,614일

나. 계 약 자 : ㈜이엔엘 대표자 박현수

다. 연기사유 : 전체 공기연장에 따른 관급자재 현장 설치시기 미도래

라. 계약금액 및 수량 : 변경없음

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 납품연기 동의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박희정		열빛총괄과장	代성호준		설비부장	07/30 권오식
협조자
시행	설비부-10576	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	pakei27@seoul.go.kr	/	대시민공개