문서번호	설비부-10517
결재일자	2018.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
협조
	경리과장

『강남순환 8공구 구룡지하차도 전기공사(장기계속)』

차수조정 및 설계변경 검토 보고

2018. 07.

『강남순환 8공구 구룡지하차도 전기공사(장기계속)』

차수조정 및 설계변경 검토 보고

구룡지하차도 위 양재대로 토목공사 공기연장에 따른 전기공사 차수

조정 및 설계변경 사항을 검토하고 보고드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사(4차)

○ 공사기간 : ’15.02.13. ~ ’18.07.31.(총차, ’12.08.02.~’18.07.31.)

○ 도 급 비 : 금235,400,000원(총차 금1,171,464,760원)

○ 공사내용 : 가로등 신설 87본, 분전반 2면, 교통신호 설비 1식

○ 시 공 사 : ㈜진영전력 대표자 송희연

○ 공 정 율 : 실(계획)공정율 83%(100%)

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단(책임건설사업관리기술자 이기수)

2		검토근거

○ 감리사 동기공 2018-3188호, 전기공사 설계변경 및 관급 납품 연장 검토보고

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행안부 예규, 2018) 제13장 공사계약 일반조건

(제6절 공사설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정 등)

3		검토내용

○ 차수별 계약변경 내용

구분	4 차		총 차
	공 사 기 간	계 약 금 액	공 사 기 간	계 약 금 액
당 초	15.02.13.~18.07.31.	235,400,000원	12.08.02.~18.07.31.	1,171,464,760원
변 경	15.02.13.~18.12.31.	146,920,000원	12.08.02.~22.12.31.	1,195,264,760원
증·감	증153일	감88,480,000원	증)1,614일	증23,800,000원

○ 차수조정 및 설계변경 사유

「강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사」 토목공사 과업내용에 ‘대모지하차도 건설’            사업을 포함하여 계약연장(당초 ’18.07.31. ⇨ 변경 ’22.12.31.) 및 설계변경함.

당해 토목공사 공기연장으로 전기공사 미시공분에 대해 다음 차수로 이월하고,           구룡지하차도 전기설비에 대한 전기안전관리자(전기사업법 제73조) 선임 추가분           (5개월)을 반영하여 설계변경하고자 함.

○ 차수조정 내용(※ 상세내용은 붙임 참조)

차수	공 종	세 부 공 종	직 접 공 사 비		증(+)·감(▽)
			당 초	변 경
4차	구룡지하차도 공사 (수배전 설비 등)	원격감시제어 관제프로그램	6,937,604	6,937,604	-
		케이블 트레이 및 접지 설비	7,414,036	7,414,036	-
	옥외가로등 공사 (신설 가로등 설비)	양재 L-가K PNL 가로등설비	50,569,889	41,664,869	▽8,905,020
		양재 L-가J PNL 가로등설비	51,731,723	-	▽51,731,723
	신호등 공사	구룡지하차도 교차로 신호등	19,922,840	-	▽19,922,840
	유지보수 공사	터널등 램프 및 안정기 교체	17,032,764	17,032,764	-
	합 계		153,608,856	73,049,273	▽80,559,583
총차	구룡지하차도 공사	수배전 설비 공사외 7종	733,253,130	733,253,130	-
	옥외가로등 공사	신설 가로등설비 공사외 1종	102,301,612	102,301,612	-
	신호등 공사	구룡지하차도 교차로 신호등	19,922,840	19,922,840	-
	유지보수 공사	터널등 램프 및 안정기 교체	17,032,764	17,032,764	-
	합 계		872,510,346	872,510,346	-

○ 총차 제비율 오류 수정

간접노무비를 계약요율로 감정정 및 보험료와 안전관리비를 법정요율로 조정

비 목	공 종	비 율	금 액		증(+)·감(▽)
			당 초	변 경
재료비	직접재료비		341,714,808	341,714,808	-
노무비	직접노무비		529,713,626	529,713,626	-
	간접노무비	직노 × 3.999%	21,978,573	21,183,247	▽795,326
경 비	기 계 경 비		1,081,912	1,081,912	-
	산재보험료	노무비 × 3.7%	20,412,071	20,383,184	▽28,8887
	고용보험료	노무비 × 0.79%	4,357,431	4,352,085	▽5,346
	퇴직금공제	직노 × 2.3%	919,258,421	918,428,862	▽1,089,559
	안전관리비	(재료+직노)×1.81%×1.2	18,521,665	18,927,426	+405,760
	기 타 경 비	(재료+노무)×3.4999%	30,590,122	31,240,516	+650,394
	건강보험료	직노 × 1.7%	2,094,290	9,005,131	+6,910,841
	연금보험료	직노 × 2.49%	3,067,520	13,189,869	+10,122,349
	노인장기요양	건보료 × 6.55%	137,176	589,836	+452,660
일 반 관 리 비		순공사×1.9999%	19,292,102	20,070,297	+778,195
이 윤		노경관×1.9999%	12,824,211	13,568,979	+744,768
총 원 가			1,017,567,964	1,037,204,328	+19,636,364
부 가 세			101,756,796	103,720,432	+1,963,636
안전관리자선임비용		440천원 × 5개월	22,440,000	24,640,000	+2,200,000
설 계 용 역 비		8공구 전기설계	29,700,000	29,700,000	-
총 합 계			1,171,464,760	1,195,264,760	+23,800,000

○ 관급자재 납품기한 연장(당초 2018.07.31. ⇨ 변경 2022.12.31.)

철제가로등주(계약번호 00115108703), LED가로등기구(계약번호 12162091009)           및 분전반(계약번호 00168330000)을 전기공사 기간에 맞추어 납품기한 연장함이 타당함      ○ 건설사업관리기술자 검토의견

선행 공종인 토목공사 지연에 따른 전기공사 기간연장이 필요

전기공사 기간연장에 따른 관급자재(가로등주, 가로등기구 등) 납품기한 연기필요

상기와 같이 검토한 결과 변경내용으로 계약함이 타당하다고 사료됨

4		조치의견

○ 상기 전기공사의 차수조정 등에 대한 건설사업관리기술자의 보고사항을 검토한 결과,         관련 법령에 적합하여 전기공사 차수변경 및 설계변경 사항에 대해 건설총괄부에         계약변경의뢰하고자 함.

○ 상기 관급자재는 전기공사 기한에 맞춰 분할납품 계약기한 연장을 의뢰하고자 함

붙임  1. 감리보고서 1부.

2. 변경물량내역 및 변경내역서 각 1부.

3. 예정공정표 각 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 참고자료(토목공사 설게변경 보고서 등) 각 1부.  끝.