		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	가락몰 판매동 자동문 설치공사 시행

1. 관련근거

가. 임대관리팀-781호(‘18.05.03)「가락몰 자동문 설치 요청」

나. 건설공사팀-532호(‘18.05.04)「기술용역타당성심사 요청」

다. 서울시기술담당관-7646호(‘18.05.08)「기술용역타당성심사 결과 통보」

라. 건설공사팀-554호(‘18.05.11)「가락몰 판매동 자동문 설치공사 설계용역(건축) 시행」

마. 건설공사팀-609호(‘18.05.24)「설계도면 검토 요청」

바. 임대관리팀-1014호(‘18.06.12)「설계도면 검토결과 회신」

사. 건설공사팀-686호(‘18.06.12)「설계용역(건축) 준공」

아. 건설공사팀-692호(‘18.06.15)「주요투자사업 사전심사 결과통보」

2. 상기 대호와 관련하여 가락몰 영업개선을 위한『가락몰 판매동 자동문 설치공사』를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공사명 : 가락몰 판매동 자동문 설치공사

나. 공사개요

1) 위    치 : 서울특별시 송파구 양재대로 932(가락동 600) 가락몰 내

2) 공사내용 : 가락몰 판매동 영업개선을 위한 자동문 설치공사

- 판매동 B1~3F층(식당가, 수산/건어/축산직판, 청과직판) 자동문(16개소)

구분 (개소)	합계	식당가 (3F)	수산/건어/축산직판(1F)			청과직판 (B1)
			수산	건어	축산
자동문	16	3	1	4	4	4

구분 (공종)	위치	공사 주요내용
		품명	수량	금액(천원)
창호 / 금속 공사	판매동 3F(식당가)	3.9*3.1 외 2개소	3개소	11,160
	판매동 1F(수산,건어,축산직판)	7.0*3.2 외 8개소	9개소	34,180
	판매동 B1(청과직판)	4.6*3.0 외 3개소	4개소	15,960
	판매동(B1, 1F, 3F)	비상용 소방연동장치	16개소	4,320
	판매동 B1(청과직판),1F(수산직판)	볼라드설치(∅150)	16개소	1,437
	판매동 1F(수산직판)	일반구조용각형강관	7m	719
	판매동 1F(수산직판)	케미컬앵커(∅16)	8개소	142

다. 공사기간 : 착공일로부터 45일간

라. 소요예산 : ₩90,990,000원(부가세 포함)

마. 예산과목 : 자본적지출/유형자산취득/건물/신축매장시설보완공사(자산취득비등)

바. 예산현황

(단위:천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회 집행예정액	예산잔액
신축매장 시설보완공사	567,610	222,083	221,992	90,990	345,618

사. 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한, 긴급)

아. 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제9조에 의한 “금속구조물․창호공사업” 면허를 등록한 업체로서 법인등기부상 본점소재지가 서울특별시에 소재한 업체(법인등기부상 본점소재지 판단 기준일은 입찰공고일 전일로 하며, 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격을 유지해야 함)

붙 임 :	1.	공사개요	..................	1부.
	2.	주요투자사업사전심사 결과	..................	1부.
	3.	예정공정표	..................	1부.
	4.	청렴계약이행서약서	..................	1부.
	5.	부당계약특수조건 체크리스트	..................	1부.
	6.	일상감사요청서	..................	1부.
	7.	원가계산서	..................	1부(별첨).
	8.	수량산출서	..................	1부(별첨).
	9.	설계도면	..................	1부(별첨).
	10.	공사시방서	..................	1부(별첨).	끝.

★담당자						팀장				건설안전본부장			사장		06/19
		김형근						강성규			김승호			박현출
협조자	부장		백정환				팀장	정원교					감사실	감사필

시행			건설공사팀-709				(2018.06.19)			접수				(2018.06.19.)
우	138-701			서울특별시 송파구 양재대로 932(가락동 600)								/	http://www.garak.co.kr
전화		02-3435-0567			전송	02-3435-0557		/	2009016@garak.co.kr					/	공개

[붙임 1]

공 사 개 요

1. 공사명 : 가락몰 판매동 자동문 설치공사

2. 공사개요 및 현황

가. 공사개요

1) 위 치 : 서울시 송파구 양재대로 932(가락동 600) 가락몰 내

2) 공사내용 : 가락몰 판매동 영업개선을 위한 자동문 설치공사

구분 (공종)	위치	공사 주요내용
		품명	수량	금액(천원)
창호 / 금속 공사	판매동 3F(식당가)	3.9*3.1 외 2개소	3개소	11,160
	판매동 1F(수산,건어,축산직판)	7.0*3.2 외 8개소	9개소	34,180
	판매동 B1(청과직판)	4.6*3.0 외 3개소	4개소	15,960
	판매동(B1, 1F, 3F)	비상용 소방연동장치	16개소	4,320
	판매동 B1(청과직판),1F(수산직판)	볼라드설치(∅150)	16개소	1,437
	판매동 1F(수산직판)	일반구조용각형강관	7m	719
	판매동 1F(수산직판)	케미컬앵커(∅16)	8개소	142

3) 공사기간 : 착공일로부터 45일간

4) 공사금액 : ₩90,990,000원(부가세 포함)

나. 예산과목 : 자본적지출/유형자산취득/건물/신축매장시설보완공사(자산취득비등)

다. 예산현황                                                      (단위:천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회 집행예정액	예산잔액
신축매장 시설보완공사	567,610	222,083	221,992	90,990	345,618

3. 관급자재 내역 : 없음

4. 설 계 자 소속 : 건설공사팀 직급 D급  성명 백 정 환

5. 설계심사 소속 : 건설공사팀 직급 팀장  성명 강 성 규

6. 감 독 원 소속 : 건설공사팀 직급 가급  성명 김 형 근

7. 검 사 원 소속 : 건설공사팀 직급 팀장  성명 강 성 규

건설공사팀 직급 D급  성명 백 정 환

8. 기성고 지급횟수 : 해당없음

9. 하자보수보증금 기간 : 계약금액의 3%, 3년

10. 지연 배상금 : 0.5/1,000

11. 설계서 열람장소 :  건설안전본부 건설공사팀

[붙임 2]

주요투자사업 사전심사 결과

[붙임 3]

예 정 공 정 표

1. 공 사 명 : 가락몰 판매동 자동문 설치공사

2. 공사기간 : 착공일로부터 45일간

3. 예정공정표

(단위:일)

일 정 공 종	착공일로부터 45일
	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
○ 착공계(공사계획 포함) 제출 ○ 가설공사 및 철거공사
○ 금속창호 및 유리공사 - 구조보강 각형강관 설치 - 창호 프레임 설치 - 자동문 설치 / 유리끼우기
○ 기타 잡공사 - 볼라드 설치 - 모르타르 채우기
○ 폐기물처리 및 현장정리 ○ 공사 준공

[붙임 4]

서울특별시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에  중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자『가락몰 판매동 자동문 설치공사』에 청렴계약제를 시행합니다.

우리공사는 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부만 위원회 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

FAX  768-8846

2018년  6월

		계약부서	경영본부장	김 성 수
			재무팀장	김 이 종
			계약담당	류 종 수
		발주부서	건설안전본부장	김 승 호
			건설공사팀장	강 성 규
			공사담당	김 형 근

[붙임 5]

「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명	가락몰 판매동 자동문 설치공사
발주부서	부서명	건설공사팀	작성자	김 형 근	연락처	3435-0567
계약부서	부서명	재 무 팀	작성자	류 종 수	연락처	3435-0381
제출일자	2018. 6.

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 산하기관을 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N □□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 서울시의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 서울시가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N □□

[붙임 6]

［감사규정 시행내규 별지 제11호 서식］(제21조 관련)

일상감사 요청서

건 명

가락몰 판매동 자동문 설치공사

1. 사업개요

가. 사업근거

○ 임대관리팀-781호(‘18.05.03)「가락몰 자동문 설치 요청」

○ 건설공사팀-554호(‘18.05.11)「가락몰 판매동 자동문 설치공사 설계용역(건축) 시행」

나. 사업내용

구분 (공종)	위치	공사 주요내용
		품명	수량	금액(천원)
창호 / 금속 공사	판매동 3F(식당가)	3.9*3.1 외 2개소	3개소	11,160
	판매동 1F(수산,건어,축산직판)	7.0*3.2 외 8개소	9개소	34,180
	판매동 B1(청과직판)	4.6*3.0 외 3개소	4개소	15,960
	판매동(B1, 1F, 3F)	비상용 소방연동장치	16개소	4,320
	판매동 B1(청과직판),1F(수산직판)	볼라드설치(∅150)	16개소	1,437
	판매동 1F(수산직판)	일반구조용각형강관	7m	719
	판매동 1F(수산직판)	케미컬앵커(∅16)	8개소	142

다. 공사금액 및 공사기간

○ 공사기간 : 착공일로부터 45일간

○ 공사금액 : ₩90,990,000원(부가세포함)

2. 자체 검토의견

가. 사업의 추진배경

○ 임대관리팀-781호(‘18.05.03)「가락몰 자동문 설치 요청」

○ 건설공사팀-532호(‘18.05.04)「기술용역타당성심사 요청」

○ 서울시기술담당관-7646호(‘18.05.08)「기술용역타당성심사 결과 통보」

○ 건설공사팀-554호(‘18.05.11)「가락몰 판매동 자동문 설치공사 설계용역(건축) 시행」

○ 건설공사팀-609호(‘18.05.24)「설계도면 검토 요청」

○ 임대관리팀-1014호(‘18.06.12)「설계도면 검토결과 회신」

○ 건설공사팀-000호(‘18.06.12)「설계용역(건축) 준공」

○ 위 방침에 의한 ‘18년 투자사업 예산 추진으로 적정

나. 사업의 필요성

○ 가락몰 판매동 입주상인의 영업환경 및 물류환경 개선을 통한 영업 활성화 기대

다. 사업의 적정성(관련규정 검토)

○ 가락몰 판매동 입주상인의 영업환경 개선이 필요

라. 기대되는 효과

○ 가락몰 판매동 입주상인의 영업환경 개선으로 활성화 기대

○ 가락몰 이용고객을 위한 시설개선으로 쾌적한 쇼핑환경 제공 기대