투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울도서관
수신	내부결재
(경유)
제목	계약변경 의뢰(2014년 서울도서관 가구제작)

우리 부서에서 시행 중인 『2014년 서울도서관 가구 제작』 에 대하여 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약명  : 2014년 서울도서관 가구 제작

나. 계약금액 : 20,900,000원(이천구십만원)

다. 계약기간 : 계약일로부터 30일

라. 계약자   : ㈜동성나이키

마. 계약변경 내용

(단위:원)

납품기한		변경사유
당초	변경
2014.5.24	2014.6.7	서가제작으로 인한 도서의 소장위치 및 대출정보 변경을 시민에게 사전고지하기 위한 기간(2주) 필요

바. 예산과목 : 도서관 및 독서문화진흥, 마을권 독서문화공간조성, 서울도서관 운영, 정보자료관리 및 자료실 운영관리, 자산취득비(10-405-01)

주무관	양수임		정보서비스과장	05/20 안옥연
협조자	주무관	하개헌
시행	정보서비스과-3788	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울도서관 정보서비스과	/
전화	02-2133-0257	/전송	02-2133-0392	/	redsswim@seoul.go.kr	/	대시민공개