뉴딜일자리 복합문화공간 조성을 위한

공공건축가 추천 요청서

요청 기관	일자리노동정책국 일자리정책담당관				팀 장		홍승기 (☎2133-5467)				담당자	지관우 (☎2133-5468)
구분 ※ 해당란 체크	수의		지명		자문	○	심사	○	기타

□ 사업 개요

○ 사업위치 : 송파구 문정동 651번지 문정동 테라타워 A동 G10호

○ 사업규모 : 지하1층 (건물: 330.9㎡, 토지 66.29㎡)

※ 송파구에서 약30%(100㎡)를 일자리허브 시설로 조성 예정

○ 주 용 도 : 문화 및 집회시설

○ 사 업 비 : 200백만원  (설계용역비 15, 공사비 185)

○ 시 특별교부금 교부여부 : 해당없음

○ 사업기간 : ‘18년 8월 ～ ’18년 11월

□ 설계용역 발주계획

○ 발주 시기 : 2018년 8월

○ 발주 방식 : 수의계약

○ 과업 기간 : 계약후 30일 이내

○ 기술용역타당성심사 이행여부 : 무 (타당성심사 예정)

○ 기 발주시 용역수행자 : 해당없음

□ 공공건축가 활용

○ 활용 인원 : 1명

○ 활용(예정)시기 :  ‘18년 8월 ～ ’18년 11월

○ 활용 방법 : 뉴딜복합공간 조성관련, 기술용역타당성 심사 및 공간조성 추진단(가칭)에 지속 참여하여 설계과정에서부터 리모델링후 시공단계까지 전문가 자문 및 설계자·시공사간 의견조율 역할 수행

□ 특이사항

- 뉴딜 복합공간은 동남권역의 뉴딜일자리사업 참여자들의 직무·취창업교육 및 지역청년들이 일자리관련 정보공유, 취업박람회 참가 등을 위한 다목적 기능뿐 아니라, 문정지구에 입주한 기업들이 청년들과 같이 공유하고 소통할 수 있는 복합문화공간으로 조성

- 본 사업 추진위원회는 市 공공건축가를 포함, 일자리사업 전문가, 청년대표, 관련부서 공무원 등으로 구성 예정

⇒	청년일자리 시설 설계경험 및 식견이 있는 건축가 추천 요청

▢ 위치 및 현황사진

대상지
사무실(외관)	사무실(내부)

붙임 : 뉴딜일자리 복합문화공간 조성 및 설계용역 추진계획 1부.  끝.