문서번호	설비부-10670
결재일자	2018.8.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
협조

「노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사」

임시소방시설 관련 내역변경 검토보고

2018. 08.

도시기반시설본부

설    비    부

「노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사」

임시소방시설 관련 내역변경 검토보고

우리 본부에서 추진 중인「노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사」의 “임시소방시설” 등에 대한 내역변경 관련 검토 보고임

1		기계공사 개요

❍ 위    치: 용산구 양녕로 445일대(이촌동, 노들섬 내)

❍ 공사규모: 지상 3층, 연면적 9,385㎡(최고 높이 15.05m)

❍ 공사기간: 2017.12.08.~2019.06.07.(1차 : 2017.12.08.~2018.07.31.)

❍ 공사금액: 총차 1,951,474,000원(1차: 40,000,000원)

****************************************

2		관련근거

❍ 노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사 _내역서 변경(장기1차, 장기2차)

- 책임건설사업관리자 실정보고(유탑노들 제18-163호, 2018.07.24.)

❍「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조의2

- 공사장 임시소방시설 설치 의무화(2015.1.8. 시행)

3		검토내용

❍“임시소방시설공사”등 1·2차간 내역변경 검토

구 분	당 초	변 경	비고
장기 1차	·대형분말소화기 20Kg×29개	·대형분말소화기 20Kg×6개 ·2차공사분 중 위생배관 일부 포함
장기 2차	·대형분말소화기 20Kg×13개	·간이소화장치 65L/min, 20분×6개 ·2차공사분 중 위생배관 일부 삭제

※ 소방 관련규정 및 임시소방설비 설치계획에 따라 공사장 임시소방시설 강화

❍ 공사비 검토(금액변동 없음)

구분	당 초	변 경	증·감액	비 고
총차	1,951,474,000	1,951,474,000	-	장기1차, 장기2차간 내역 조정·변경
1차	40,000,000	40,000,000	-
2차	1,283,452,830	1,283,452,830	-

4		조치사항

❍ 소방 관련규정 등에 따라 책임건설사업관리기술자의 검토결과 타당성이 인정되므로, 1·2차간 조정(금액변동 없음)된 내역으로 계약변경 후 장기 1차분에 대해 준공 처리코자 함.

붙임  책임건설사업관리기술자 실정보고서 1부.  끝.