투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	"탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사" 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 설비부-11645(2018.8.23.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 “탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사”에 대해 다음과      같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

구 분	차 수	공 사 기 간		비고
		변 경 전	변 경 후
통신공사	총차	2017.11.23. ~ 2020.01.22.	2017.11.23. ~ 2020.03.31.	증 69일
	1차	2017.11.23. ~ 2018.08.31.	2017.11.23. ~ 2019.02.14.	증 168일

나. 준공기한 연기사유 : 선행공종인 토목 및 건축공사 지연에 따른 공기연장

다. 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과대상: 미부과

마. 공사금액: 변경없음

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 2부.  끝.

	설비부장
주무관	전성완		환경설비과장	여인웅		설비부장	08/23 권오식
협조자
시행	설비부-11677	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)500-7431	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	대시민공개