문서번호	급수운영과-15585
결재일자	2018.8.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		이승영	08/24 이병운
협 조
	주무관			서순란

대체 급수 연결관 신설 검토보고

(염리동 58-2)

2018. 08. 24

급 수 운 영 과

대흥동~염리동 우체국외 3개소 송배수관 정비공사와 관련, 소출수 해소 및 대체급수 관로 확보를 위한 배수관 연결 부설 사항이 있어 현장을 조사하고 결과를 아래와 같이 보고 드림.

1. 대체급수 관로 연결 개요

가. 공사내역 : 연결관 부설(D=200mm, L=3m, 밸브 1개소)

나. 위     치 : 마포구 염리동 58-2 앞

다. 부설사유 : 소출수 해소 및 대체급수 관로 확보

라. 소요예산 : 5백만원

염리동 58-2 앞(300mm 관로 연결)

서강대 후문

용강초등학교

기존관

300mm

기존관

300mm

200mm 연결관

연결

700mm 폐쇄

소출수 발생

2. 조사현황

가. 연결관 300mm 부설 완료 후 700mm 일부 관로를 폐쇄하였으나, 누수 등 수계 조절 시 소출수 발생 우려가 있어 이에 대한 대책 마련이 필요한 실정이며,

나. 염리동 58-2 앞 300mm 관로 연결 시 소출수 해소 및 우회 급수 가능함.

3. 보고자의견 및 조치계획

- 누수 등으로 인한 밸브 조절 시 소출수 발생 우려가 있으므로 연결관로를 조속히 부설함이 타당할 것으로 사료됨

- 노후배급수관 정비 예산을 사용하여 서강동외 7개동 상수도 공사업체에 작업지시 후 정산처리코자함

4. 작업계획 및 단수 지역

가. 작업일시 : 2018. 08. 30(목)

나. 시 공 자 : ************

다. 단수지역 : 밸브 조정으로 단수지역 없음

첨부 : 1. 연결관 부설 도면 1부. 끝.