자문 검토 의견서

○ 서초구 효령로 목전빌딩 앞 일대 열수송관 공사

안 건	검 토 의 견
서초구 효령로 목전빌딩 앞 일대 열수송관 공사	1. 차로수가 줄어드는 구간은 가급적 바깥차로에서 차로변경을 하도록 계획 검토 2. 심야시간대 공사를 하므로 버스정류장 이전은 혼란방지를 위해 재검토 필요 3. 2단계 : 3차로→1차로로 변경되는 완화, 완충구간에 대하여, 야간 시인성 강화를 위한 안전시설물을 보강하여 안전을 도모하기 바람. 4. 4단계 : ①서일초교정류소 앞 교차로의 남북방향 교통류(2현시)처리방안을 제시하기 바람. 5. 5, 6단계 : 횡단보도구간 공사로 인한 보행동선 확보방안을 보다 구체적으로 제시하기 바람.

2018. 08. 30