보 고 서
			담당	팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호	도로관리처-8048
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2018.08.28.
공개여부	공개
제목	설계변경(정산)보고 (2018년 북부간선고가교 폐기물처리용역 및 아스콘 자재구매)

1				공 사 현 황

□ 공 사 명 : 2018년 북부간선고가교 교면포장 개량공사

□ 공사기간 : 2018년 05월 25일~2018년 11월 30일

□ 도 급 액 : 752,296,900원

□ 공사개요 : 교면방수 및 아스콘포장 A=97.75a

□ 도 급 자 : 태평로건설 ㈜

2				보 고 내 용

	「2018년 북부간선고가교 교면포장 개량공사」시행 중 노면절삭 결과 기존 아스팔트콘크리트 포장의 두께가 당초 설계내용과 상이하여 아래와 같이 현장 실측수량 및 반입수량으로 설계변경(정산) 하고자 함.

【관련문서 : 도로관리처-7903호(2018.08.23.)호 “기존 아스콘 포장두께(수량) 변경 검토보고”】

□ 기존포장 두께 실측현황

구 간	설계 두께	실측 두께 (평균값)	증·감
구리방향 (MP30~MP42)	8.0㎝	9.7㎝	증)	1.7㎝
월곡방향 (MP19~MP32)	8.0㎝	8.5㎝	증)	0.5㎝

□ 공사구간 별 연장 실측현황

구간	방향	설계 연장	실측 연장	증·감		비고
MP30~MP42	구리	600m	596.75m	감)	3.25m
MP19~MP30	월곡	550m	547.00m	감)	3.00m
MP30~MP32	월곡	-	100.60m	증)	100.60m	추가정비

□ 폐기물 수량 및 용역비 변경 현황

□ 폐기물 수량 산출내역

(단위 : ton)

구간	방향	성상	당초	변경 (실측)	증·감
합계		폐아스콘	1,453	1,818	증)	365
		혼합폐기물	385	437	증)	52
		폐콘크리트	23	-	감)	23
MP30~MP42	구리	폐아스콘	759	949	증)	190
		혼합폐기물	200	207	증)	7
MP19~MP30	월곡	폐아스콘	694	740	증)	46
		혼합폐기물	185	188	증)	3
MP30~MP32 (추가정비)	월곡	폐아스콘	-	129	증)	129
		혼합폐기물	-	42	증)	42

□ 폐기물 설계변경(정산) 수량

(단위 : ton)

성상	당초	변경 (실측)	올바로입력 수량	비고
합계	1,861	2,255	2272.33
폐아스콘	1,453	1,818	1,830.78
혼합폐기물	385	437	441.55
폐콘크리트	23	-	-

※ 상기 폐기물 변경(실측)수량 2,255ton으로 정산 하고자 함.

□ 용역비(폐기물처리) 변경

구 분	당초금액	변경금액	증·감
총 용역비	56,705,000원	66,700,000원	증)	9,995,000원

□ 관급자재(아스콘) 수량 및 관급비 변경 현황

□ 아스콘 수량 산출내역

(단위 : ton)

구간	방향	당초	변경(반입)	증·감		비고
합계		1,875	2,279	증)	404	-
MP30~MP42	구리	978	1,167	증)	189	t=9.7㎝
MP19~MP30	월곡	897	939	증)	42	t=8.5㎝
MP30~MP32	월곡	-	173	증)	173	t=8.5㎝ (추가정비)

□ 아스콘구매 설계변경(정산) 수량

(단위 : ton)

종류	당초 계약수량	기존 포장 실측 수량	변경 (반입) 할증 1.1%	2% 할증 수량
개질SMA	1,875	2,255	2,279	2,300

※ 상기 아스콘 변경(반입)수량 2,279ton으로 정산 하고자 함.

□ 관급자재비(아스콘) 변경

구 분	당초금액	변경금액	증·감
관급자재비	224,360,660원	272,639,440원	증)	48,278,780원

3				행 정 사 항

□ 상기 내용을 반영하여 총무처에 폐기물처리용역 변경계약 및

□ 아스콘자재 변경구매 요청.

관련문서 : 「2018년 북부간선고가교 교면포장 개량공사」 낙찰차액 사용계획 보고

붙    임 : 1. 시공사 실정보고서 1부.

붙    임 : 2. 폐기물처리용역 변경내역서 1부.

붙임 : 3. 폐기물 올바로 데이터 1부.

붙임 : 4. 관급자재(아스콘) 변경내역서 1부.

붙임 : 5. 아스콘 송장 1부.  끝.