문서번호	건축부-12800
결재일자	2018.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
고병준		이형재	전결 09/07 임인구
협조	주무관		조문석
	주무관		이정빈

창동역 고가하부 문화예술공간 조성공사

건축·토목 관급자재 신규 및 변경 검토보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『창동역 고가하부 문화예술공간 조성공사』

건축·토목 관급자재 신규 및 변경 검토보고

우리본부에서 추진중인『창동역 고가하부 문화예술공간 조성공사』의 건축 및 토목 관급자재에 대한 신규 및 변경사항이 발생하여 검토보고 드림.

1		공사현황

□ 공사개요

○ 위    치: 도봉구 창동역 1번출구 앞 고가하부

○ 규    모: 건축물 7개동, 연면적 450㎡ 및 조경시설물

○ 도급금액: 760,832천원

○ 공사기간: 2017.12.19.~2018.10.18.

□ 추진경위

○ ‘17. 04. 11: 고가하부 문화예술공방 조성사업 추진계획 수립

○ ‘17. 06. 21: 설계용역 착수

○ ‘17. 11. 30: 공사발주

○ ‘17. 12. 19: 공사착공

※ 실 착공 지연(의뢰부서 요구사항 반영)

- 동 사업관련 지역주민 설득(주민설명회), 조성계획 변경 등을 위해 착공연기 요청

○ ‘18. 04. 20: 설계용역 준공 및 조성계획 변경 요구(동북권사업단)

○ ‘18. 06. 18: 계획변경 관련 자문회의(동북권사업단)

○ ‘18. 08. 10: 설계변경 자문소위원회(결과: 조건부 가결)

2		관급자재 변경현황 및 신규구매계획

□ 관련문서

○ 건축-11419(2018.8.18)호. 『설계변경자문 소위원회개최 결과보고(소2018-8차)』

□ 신규 및 변경 사유

○ 사업의뢰부서의 조성계획 변경

□ 변경내용

(단위: 원)

공종	품 명	규 격	단 위	변경전			변경후
				수량	금액	기간	수량	금액	기간
토목	보차도용 콘크리트 블록	t=60mm	㎡	903	20,769,000	‘18.9.10까지	607	13,961,000	‘18.11.30까지
	자연석경계석(직선)	200×250×1000	개	154	3,997,840	‘18.5.5까지	154	3,997,840	‘18.11.30까지
	자연석경계석(곡선)	200×250×1000	개	9	383,490		9	383,490
	자연석경계석(직선경사)	200×250(100)×1000	개	18	475,020		10	263,900
계					25,625,350			18,606,230

□ 신규내용

(단위: 원)

공종	품 명	규 격	단 위	수량	금액	기간
토목	레미콘	25-21-80	㎥	57.9	3,711,390	‘18.11.30까지
	아스팔트콘크리트	표층용 일반	ton	31	1,885,730
		중층용 일반	ton	194	11,081,280
		기층용 일반	ton	99	5,220,270
	원심력철근콘크리트관	D250mm (보통2종)	본	35	1,347,500
	자연석경계석(직선)	200×250×1000	개	85	2,491,350
	자연석경계석(곡선)	200×250×1000	개	18	809,640
	자연석경계석(직선)	200×100×1000	개	16	233,440
	자연석경계석(곡선)	200×100×1000	개	15	327,150
	자연석경계석(곡선경사)	200×250(100)×1000	개	4	178,240
	자연석경계석(직선)	100x100x1000	개	69	520,950
	자연석경계석(곡선)	100x100x1000	개	20	302,400
	볼라드	ø120*900mm매립식	개소	8	1,728,000
건축	레미콘(버림)	25-18-80	㎥	10.6	640,982	‘18.11.30까지
	레미콘(구조)	25-21-150	㎥	70	4,631,900
	철근콘크리트용봉강	SD400 HD-13	ton	1.987	1,456,213
	철근콘크리트용봉강	SD400 HD-16	ton	1.422	1,034,704
	단열 커튼월 +프로젝트	불소수지(2회)/롤방충망 포함	kg	3,419	48,549,800
	단열미서기	불소수지(2회)	kg	935	11,687,500
	미서기 방충망	불소수지(2회)	kg	233	3,122,200
	갤러리	불소수지(2회)	kg	662	6,189,700
계					107,150,339

○ 신규품명 소요예산: 107,150,339원(조달수수료 별도)

○ 구매계획

- 구매방법: 조달구매

- 투입시기: 공사일정에 따라 구매 및 납품요구

○ 예산과목

- 지역발전본부 동북권사업단, 도시경제기반형 활성화계획 추진, 창동·상계 신경제중심지 조성, 문화예술 공방 조성, 시설비

3		검토의견

○ 사업의뢰부서의 조성계획 변경 및 부대토목공사 일정 변경에 따라 계약기간 연장 및 물량증가가 필요하다고 판단됨.

○ 관급자재 신규 및 변경사항에 대하여 총무부에 계약(변경)의뢰하고자 함.

붙 임: 1. 조달물품매입요구서 각 1부

2. 관급자재 수급관리조서 1부

3. 관급자재 상세정보 각 1부.  끝.