주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 조성 기계공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 종로구 율곡로 3길 4(구 풍문여고)
공사개요	○ 서울공예박물관 조성 기계공사 - 6개동, 지상 3～5층 (연면적 10,625㎡) - 급수급탕, 오배수, 공조덕트, 방음방진설치, 가스공사 등 기계설비공사 - 옥내소화배관, 스프링클러배관, 소화가스배관, 내진설치 등 기계소방공사 - 자동화재탐지설비, 유도등설비 등 전기소방공사
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과 – 관급공사, T.A.B, 분담금공사 심사제외

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절 감 액	절감률
총 괄	4,362,655	4,036,703	325,952	7.47%
기계설비	1,974,792	1,804,891	169,901	8.60%
기계소방	1,544,472	1,470,920	73,552	4.76%
전기소방	843,391	760,892	82,499	9.78%

□ 주요 심사내용

《 기계설비 》

◦ 자재단가 조정 : 고무발포 보온재(강관용, D15×13T) 외 163종

- 고무발포 보온재(강관용, D15×13T)/m : 1,403원 → 1,209원(감 194원)

- PVC관(VG2, DTS, D50)/m : 1,250원 → 950원(감 300원)

◦ 일위대가 조정 : 방화댐퍼(F.D, STL, 500×350) 외 109개 공종

- 방화댐퍼(F.D, STL, 500×350)/EA : 덕트공 0.500 → 0.415인

- 전기온수기(15L, 1.5kW)/대 설치 서울형품셈 적용

: 보일러공 2.0 → 0.187인, 비계공 0.3 → 보통인부 0.083인

◦ 코아드릴 경비항목 조정 : 크롤러 드릴 → 코어드릴

《 기계소방 》

◦ 자재단가 조정 : 소방용 밸브(앵글밸브, D40) 외 95종

- 소방용 밸브(앵글밸브, D40)/EA : 20,000원 → 16,800원(감 3,200원)

- 게이트 밸브(OS&Y, D100)/EA : 126,000원 → 123,620원(감 2,380원)

◦ 일위대가 조정 : 발열선 설치 외 19개 공종

- 발열선 설치(Self Regulating Heating Cable)/m

: 플랜트전공 0.036 → 기계설비공 0.017인, 보통인부 0 → 0.006인

- 여과망(D200, 10kg)/EA

: 배관공 0.471 → 0.316인, 보통인부 0.188 → 0.105인

◦ 코아드릴 경비항목 조정 : 크롤러 드릴 → 코어드릴

《 전기소방 》

◦ 자재단가 조정 : 중계기 외 3종(조달청단가 등)

- 중계기(4/4, 감시/제어) : 170,000원/대 → 83,500원/대

- 중계기(2/2, 감시/제어) : 150,000원/대 → 48,700원/대

◦ 일위대가 조정 : 절연전선 설치 외 20개 공종

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 2열 동시작업 적용

(내선전공 : 0.009인 → 내선전공 : 0.008인)

- 감지기 철거(광전식 2종) 설치 품 조정

(내선전공 : 0.065인 → 내선전공 : 0.039인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음