문서번호	도시철도설비부-8765
결재일자	2018.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
양인석	강치석	09/13 구자훈

9호선 3단계 영업시운전 결과 보고

2018. 9. 10.(월)

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

도시철도 9호선 3단계 영업시운전 일일 결과 보고

국토교통부(철도시설안전과-2199호,´18. 8. 7.), 한국교통안전공단

(철도기술처-1194호,´18. 6.26) 및 철도종합시험운행 시행 지침에 의거 9호선

3단계 영업시운전을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시 험 개 요

▢ 관련법령 : 철도종합시험운행 시행지침 제 13조

▢ 시험기간 1차 : ´18. 8.11. ~ ´18.11. 4(72일간, 휴일 제외)

▢ 운전시간 : 09:00 ~ 18:00

▢ 시험차량

-  8.31까지 : 평 일[4칸 2대, 6칸 2대(3회 왕복)]

토·일[4칸 2대, 6칸 1대(3회 왕복)]

- 10. 5까지 : 평 일[4칸 1대, 6칸 1대(3회 왕복)]

- 10. 6 ~ 11. 4 : 영업운행도표로 추진

▢ 시 험 자 : 철도시설관리자 +  철도운영자

- 철도시설관리자 : 서울시도시기반시설본부 분야별 담당 주무관

- 철도운영자 : 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주)]

▢ 시험방법 : 국토교통부에 제출한 종합시험운행 시행계획

[영업시운전 절차서]에 따라 시험자가 시행

- 한국교통안전공단에서 필요시 서울시에 사전 통보하고 입회

▢ 영업시운전 내용

계	운 전	영 업	비 고
31	11	20

▢ 추진일정

영업 시운전		시험결과 검토		시정(개선)명령통보
´18.8.11~11. 4	⇨	´18.11.5~11. 7	⇨	´18.11. 8	⇨
서 울 시		한국교통안전공단		국토교통부
조치계획 수립		조치완료 확인		영업시운전(개통)
´18.11. 9	⇨	´18.11. 9	⇨	´18.12월중
서 울 시		한국교통안전공단		서울교통공사

Ⅱ		시 험 결 과

▢ 금일실적                                 2018. 9. 10.(월)

1단계 관제센터 통제		시운전 시험시간
급 전	단 전
10 : 36	15 : 37	11 : 04 ∼ 15 : 30

▢ 터널내 안전점검 : 이상없음(해당공구 책임감리원, 현장대리인)

▢ 시운전 전동차

○ 시험열차 : 2편성

- 1단계 운영사 : 1편성(4량 열차)

- 2단계 운영사 : 1편성(6량 열차)

▢ 시험내용

○ 열차 정보 (CO-04)

↳ 출·도착 홈 안내게시기 표출.

▢ 영업시운전 장애(보완)사항 조치내용 : 없음

정거장	분 야	장애(보완)사항	조치사항	비 고
931	기계	하선승강장 2-3 PSD 닫히지 않음	시공사 현장출동 조치완료
932		-
933		-
934	기계	상선승강장 4-2 PSD 닫히지 않음	시공사 현장출동 조치완료
935		-
936		-
937		-
938		-

▢ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회 사 명	작업 구간	작 업 명	작업 인원	작업 일시
1	시설	서울메트로 9호선운영	933~934 본선터널	토목,궤도시설물 점검	신지민외 1명	9.10. 16:30~21:00
2	전기		931하선 유치선	전차선로 일상점검	김종태 외 2명	9.11. 01:45~04:00
3	기계		935 정거장	승강장 안전문 작동점검	김준수 외 4명	9.10. 16:00~18:00
4	통신	KT	932~933 본선터널	장애처리	최정우외 2명	9.10. 19:00~05:00

▢ 명일 계획

○ 시운전시간 : 2018. 9. 11.(화) 09시 ~ 17시(주간)

○ 시운전 열차 : 4량 1편성, 6량 1편성

○ 시운전내용

○ 열차 정보 (CO-04)

↳ 출·도착 홈 안내게시기 표출.

※ 특이사항 없음.   끝.