보 고 서
			담당	팀장	상가운영처장	복지경제본부장
문서번호	상가운영처-10100
보존기간	준영구		협 조	차장
결재일자	2018.07.10.
공개여부	공개
제목	설계변경 보고(2018년 지하도상가 승강설비 유지보수 연간단가용역)

1		용역현황

가. 용 역 명：2018년 지하도상가 승강설비 유지보수 연간단가용역

나. 용역기간：2018. 1. 11 ∼ 2018. 12. 31

다. 용 역 비：224,186,820원

라. 용역개요 : 지하도상가 승강설비 월간점검(월1회), 수시점검, 중보수작업등

마. 용 역 사：(주)세아엘리베이터 대표 임성수

2		보고내용

- 상기 용역의 설계변경을 아래와 같이 보고합니다.

가. 설계 변경 사유

1) 설계변경 주요내용

연번	작업지시	주요 내용	증.감	비고
1	□ 1차	① 강남터미널 (10번출구 하행 좌,우측) - 핸드레일 교체. ② 잠실역 (7번출구 상행 좌측) - 핸드레일 교체. ※관련근거: 상가운영처-5857호(‘18.04.17)	□ 증)11,996천원
2	□ 점검용역비	① 점검용역비 추가(실정보고) ※관련근거: 상가운영처-9288호(‘18.06.25)	□ 증) 3,459천원
합 계			□ 증)15,455천원

나. 용역비 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고(증․감)
도급비	공급가액	203,806,200	217,856,200	증) 14,050,000
	부가가치세	20,380,620	21,785,620	증) 1,405,000
	계	224,186,820	239,641,820	증) 15,455,000

3		조치계획

- 상기와 같이 설계변경 사항을 총무처에 의뢰하여 변경계약 하고자 함.

※기술계약심사팀과 사전구두협의로 용역 단순물량증가에 따른 심의제외대상임.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.  끝.