계약상대자 협의내역

붙임 2

□ 사전협의

❍ 계약금액조정 문서 접수(’18.5.17.)후 공사에서는 물가변동에 따른 계약금액 조정 신청건을 검토한 결과 경비 비목 중 시험검사비 부분에 대해 계약상대자에게 의견 및 회신 요청

❍ 협의기간 : ’18.5.18 ~ 6.18(비공식 4회)

- 계약금액 조정에 관한 기초금액산출 확인 및 검증

‣ 전동차제작 시험검사비 수수료 변동 사항 등

□ 공식협의 진행

❍ 협의요청문 송부(2회) : ’18.6.1(1회), ’18.8.16.(2회)

- 계약금액조정 관련 계약상대자 의견 요청

❍ 협의 경과

- 1차 : ‘18.7.13(월)/16:00~17:30

‣협의자 : 차량계획처 차장 조남욱/ 현대로템㈜ 팀장 이용주, 과장 박준서

- 2차 : ‘18.7.23(월)/16:00~17:30

‣협의자 : 차량계획처 과장 최용각/ 현대로템㈜ 과장 박준서

- 3차 : ‘18.8.2(목)/09:30~11:00

‣협의자 : 차량계획처 차장 조남욱/ 현대로템㈜ 과장 박준서

- 4차 : ‘18.8.3(금)/15:00~17:00

‣협의자 : 차량계획처 부장 우종혁/ 현대로템㈜ 팀장 이용주

❍ 협의 내용

【공  사】

- 비목군 분류에서 기타경비(시험검사비,감가상각비,Mock-up,매뉴얼) 부분을 재분류하여 공산품(감가상각비,Mock-up,매뉴얼)지수 적용 요구

- 기타경비 중 시험검사비 지수변동은 불변 적용 요구

- 계약금액 조정 요건을 검토한 결과 지수조정율 3.20%에 대하여 수용 요구

【계약상대자】

- 공사에서 검토한 물가변동에 따른 계약금액 조정에 동의함.