문서번호	급수운영과-18939
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
송현우		이경희	09/18 이성환
협조

기성(1차) 검토 보고

「난곡동 649번지 주변 외 8개소 배급수관정비공사」

2018. 9. 18.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

기성(1차) 검토 보고

「난곡동 649번지 주변 외 8개소 배급수관정비공사」

우리사업소에서 시행 중인 「난곡동 649번지 주변 외 8개소 배급수관정비공사」 에 대하여 서울시설공단으로부터 기성검사조서(1차)가 제출되어 아래와 같이 기성시행코자 보고드림

□ 공사 현황

❍ 공 사 명 : 난곡동 649번지 주변 외 8개소 배급수관정비공사

❍ 공사개요 : D=80~300㎜, L=1,035m

❍ 공사기간 : 2018. 4. 17. ~ 2018. 11. 17.

❍ 계약금액 : *************

❍ 계 약 자 :*************

❍ 공사구간

구간명	구 간(위치)	관종	구경(㎜)	연장(m)	진행사항
	계		80~300	1,035
1구간	서림동 408-64 ~서림동408-46	PVC	80	42	완료
2-1구간	난곡동 649 ~난곡동 648-1	DCIP	80	130	완료
2-2구간	난곡동 634-2 ~난곡동 701-1	SP	300	286	횡단굴착
3구간	청룡동 1582-12 ~청룡동 1582-28	CIP	300	74	완료
4구간	서림동 94-293 ~청룡동 1538-14	CIP	100~200	178	완료
5-1구간	남현동 1081~1 ~남현동 1081~5	CIP	100	76	완료
5-2구간	남현동 1055-19 ~남현동 1055-25	PE	100	116	완료
5-3구간	남현동 1056-1 ~남현동 1056-6	SP	150	68	완료
6구간	청룡동 1521-26 ~청룡동 1521-32	CIP	80	65	완료

□ 기성 개요

❍ 기성(정산)차수 : 1차

❍ 공사기간 : 2018. 4. 17. ~ 2018. 9. 14.

❍ 공사시행 : D=80~200㎜, L= 720m

❍ 금회 기성금 : *********************

❍ 예산과목

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후배급수관정비)

❍ 기성지출현황                                            (단위: 원)

계약금액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	누계 기성금액	집행잔액	비고
***********	-	*********** (35.2%)	***********	***********

□ 기성 검토결과

❍ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

❍ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상없음

❍ 기타 사항 : 이상없음

□ 조치의견

❍ 위 내용과 같이 기성내역 검토결과 적정하므로 제1차 기성을 시행코자 합니다.

붙임  1. 기성검사조서 및 관련문서 1부.

2. 기성내역서(1차) 1부.  끝.