문서번호	일자리정책담당관-15087
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
뉴딜일자리팀장	일자리정책담당관
홍승기	09/19 김혜정

뉴딜일자리 복합문화공간 설계용역 계약기간 연장계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

뉴딜일자리 복합문화공간 설계용역

계 약 기 간 연 장 계 획

서울시․송파구 협의내용, 공공건축가의 전문의견의 설계용역 반영을 통해 내실 있는 성과물 도출을 위해 계약기간을 연장하고자 함

□ 용역 개요

○ 계약건명 : 뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업 설계용역

○ 계약업체 : ******************

○ 계약기간 : 2018.8.23.~2018.9.26.

○ 계약금액 : *********************

□ 추진경위

○ 뉴딜 참여자, 기업인 의견수렴 설문조사        : ‘18.5.23~6.15

○ 뉴딜일자리 복합문화공간 조성계획 수립        : ’18.8.6.

○ 제1195차 기술용역타당성 심사 (조건부)       : ’18.8.8.

○ 뉴딜일자리 복합문화공간 설계용역 체결        : ’18.8.22.

○ 뉴딜일자리 복합문화공간 설계안 검토(1안～4안)    : ’18.8.23~9.14

□ 계약연장 사유

○ 과업의 핵심내용 중 하나인 문정동 사업공간의 공간구성 및 운영관련, 기 수립한 공간조성(안)에 대해 송파구, 공공건축가 및 서울시의 추가요청 의견이 있었고, 이러한 의견을 설계용역 반영을 위해 추가 과업기간 필요

□ 계약기간 연장 내역

○ 당초 : 2018.8.23.~2018.9.26.

○ 변경 : 2018.8.23.~2018.10.12.(16일 연장)

□ 향후계획

○ 2018. 9.19  : 계약 변경의뢰(→재무과)

○ 2018.10.12   : 설계용역 결과물 수령 및 준공검사

○ 2018.10.15.  : 공사시공업체 공개모집

○ 2018.12.10.  : 리모델링 공사완료 및 개소. 끝.