등록번호

도시재생과-1746

주무관

신촌연희도시재생팀장

도시재생과장

도시재생추진단장

등록일자

2018.9.21.

오은주

김경민

박성주

09/21

박홍표

결재일자

2018.9.21.

공개구분

대시민공개

협  조

신촌 중심가로 연계강화 마스터플랜 수립용역

용역기간 연장 계획

서 대 문 구

도시재생과

신촌 중심가로 연계강화 마스터플랜 수립용역

용역기간 연장 계획

신촌 중심가로 연계강화 마스터플랜 수립용역 추진과정에서 지연사유가 발생함에 따라 용역기간을 연장하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

□ 신촌중심가로 연계강화 마스터플랜 수립용역 입찰결과 및 수의계약 추진계획      (지역활성화과-5711, ‘18.4.19.)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 제7절 제2호(계약기간의 연장)

Ⅱ		용역 개요 및 추진경위

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 신촌 중심가로 연계강화 마스터플랜 수립 용역

○ 용역기간 : 2018. 5. 4.~ 9.30(150일)

○ 용역금액 : 금123,530천원

○ 용역업체 : ㈜지호도시건축사사무소

□ 추진경위

○ 2018. 04. 30.     : 용역계약

○ 2018. 05. 04.     : 착수신고

○ 2018. 06. 05.     : 착수보고회(총괄MP, 센터장 자문)

○ 2018. 09. 07.     : 중간보고회(총괄MP, 센터장 자문)

○ 2018. 09. 19.     : 구청장보고회

Ⅲ		준공기한 연기

□  준공기한 연기 : 30일

□  연기에 따른 귀책소재 : 계약상대자의 책임없는 사유에 해당

□  지연배상금 부과여부 : 미부과

□  내    용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
준공기한 연기	18. 5. 04. ~9. 30. (120일)	18. 5. 04. ~ 10.30. (180일)	30일 연기
용 역 비	123,530천원	123,530천원	변경없음

□  사    유

○ 신촌역 광장정비에 대한 용역보고회의 지시사항을 반영하고 후속  조치를 수행하기 위하여 과업기간 증가

※ 과업지시 : 신촌역 광장에 대하여 세부계획을 재수립하고 대형버스주정차 사항, 노천까페 활성화 방안등 다각적으로 검토.

Ⅳ		향후 계획

○ 2018. 10월초, 중순            : 중간보고회(2회)

○ 2018. 10월말                   : 최종보고회

○ 2018. 10.30.                : 용역 준공

○ 2018. 11.                    : 공사 발주

○ 2018. 12.                      : 공사 시행

첨부 : 1. 준공기한 연기의뢰 공문 및 수정 공정표(용역사)

2. 합의각서 1부. 끝.