문서번호	도시철도설비부-9278
결재일자	2018.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
양인석	강치석	10/04 구자훈

9호선 3단계 영업시운전 결과 보고

[10. 2(화)]

2018. 10. 2.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

도시철도 9호선 3단계 영업시운전 일일 결과 보고

철도종합시험운행 시행 지침에 의거 9호선 3단계 영업시운전을

실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시 험 개 요

▢ 관련법령 : 철도종합시험운행 시행지침 제14조

▢ 시험기간 : ´18. 8.11. ~ ´18.11. 5(72일간, 9.1부터 주말, 휴일제외)

▢ 운전시간 : 09:00 ~ 18:00

▢ 시험차량

-  8.31까지 : 평 일[4칸 2편성, 6칸 2편성(3회 왕복)]

토·일[4칸 2편성,  6칸 1편성(3회 왕복)]

-  9. 3 ~  9.14까지 : 평 일[4칸 1편성, 6칸 2편성(3회 왕복)]

- 10. 1 ~ 10. 5까지 : 평 일[4칸 1편성, 6칸 1편성(5회 왕복)]

- 10. 7 ~ 11. 5 : 영업운행도표로 추진

▢ 시 험 자 : 철도시설관리자 +  철도운영자

- 철도시설관리자 : 서울시도시기반시설본부 분야별 담당 주무관

- 철도운영자 : 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주)]

▢ 시험방법 : 국토교통부에 제출한 종합시험운행 시행계획

[영업시운전 절차서]에 따라 시험자가 시행

- 한국교통안전공단에서 필요시 서울시에 사전 통보하고 입회

▢ 영업시운전 내용

계	운 전	영 업	비 고
41	12	29

▢ 추진일정

영업시운전		시험결과 검토		시정(개선)명령통보
´18.8.11~11. 5	⇨	´18.11. 6~11. 7	⇨	´18.11. 8	⇨
서울시		한국교통안전공단		국토교통부
조치계획 수립		조치완료 확인		영업시운전(개통)
´18.11. 9	⇨	´18.11. 9	⇨	´18.12월
서울시		한국교통안전공단		서울교통공사

Ⅱ		시 험 결 과

▢ 시운전시간 [2018.10. 2. 화]

1단계 관제센터 통제		시운전 시간
급 전	단 전
10 : 34	15 : 40	11 : 10 ∼ 15 : 28

▢ 터널내 안전점검 : 이상없음(해당공구 책임감리원, 현장대리인)

▢ 시운전 전동차

○ 시험열차: 2편성, 5회 왕복 운행

- 1단계 운영사 : 1편성(4칸) 2회

- 2단계 운영사 : 2편성(6칸) 3회(급행)

▢ 시험내용

일자	분 야	점검내용	비 고
10. 2	설비	- 931, 934역사 기계설비 분야 합동점검(계속 추진)

▢ 영업시운전 추진실적(9.14 기준임)→ 계속 추진중

구 분	계	운전분야	영업분야	비 고
계 획	41	12	29
실 적(39%)	16	5	11

▢ 본선 출입승인

일 자	업체명	요청자	작 업 내 용
10. 2 (18:00∼21:00)	대림산업(주)	김명성	932, 933 승강장 PSD유리면 사인물 부착(상선, 하선)
10. 2∼10. 3 (18:00∼05:00)	㈜호승이앤씨	김성국	920공구 ∼ 923공구 터널 유지관리 계측 점검
10. 2∼10. 3 (22:00∼04:00)	LG U+	김영배	937 ∼ 938정거장 장비개통 및 연동작업
10. 3 (09:00∼18:00)	현대정보기술	정수봉	931 ∼ 938정거장 본선 장비 점검
10. 2 (16:00∼24:00)	포스코건설	박경우	935 ∼ 936정거장 PSD선로 미비사항 작업
10. 2 (16:00∼24:00)	현대 엘리베이터	박종근	937정거장 스크린도어 레이저센서 점검
10.04 (01:30∼04:00	대륙철도	원종덕	응급복구 비상자재운반
10. 2 (18:00∼22:00)	현창전기	박흥호	전차선 현장점검(핸드홀 접지 보강작업)

▢ 영업시운전 장애사항 현황

정거장	분 야	장애사항	비 고
931	-
932		정거장 상선 열차통과시 충돌음(추정)신고 ↳안전요원 현장출동 확인요청, 특이사항없음
933	-
934	-
935	-
936	-
937	PSD	상선 PSD 닫혔으나 열림현시 ↳시공사에 현장출동 및 조치요청 통보
938	-

▢ 명일계획

○ 시운전 시간 : 2018. 10. 4.(목) 09시 ~ 18시

○ 3단계 시운전 열차

- 4칸 1편성(일반 2회, 급행 2회 왕복)

- 6칸 1편성(일반 2회, 급행 3회 왕복).  끝.