문서번호	시설개선과-8329
결재일자	2018.10.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		정경수	10/05 박영준
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			지양수
	주무관			이경수

- 잠실제1수영장 -

공기조화기 교체공사 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10. 4(목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 정경수 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

잠실제1수영장 공기조화기 교체공사 발주 계획

잠실 제1수영장 풀내부 난방공급용 공기조화기 설비는 장기간 사용으로 효율이 저하되고 잦은 고장 발생으로 시설물 관리에 어려움이 있어 신제품으로 교체하여 쾌적한 실내환경을 조성하고자 함.

1		추진 배경

□ 근거

○ 2018년 추경 예산사업

□ 필요성

○ 장기간 사용으로 인한 노후로 잦은 고장이 발생하여 수영장 관리에 어려움

○ 내구연한에 비례하여 장비의 효율성이 떨어져 관리비용 증가

2		공기조화기 설비 현황

위치	명칭	규격	대수	설치년도	내구연한	용도
제1수영장기계실	공기조화기	467CMH	4대	1999년(2대) 2000년(2대)	9년	수영장 풀내 난방공급
제1수영장 공기조화기				공기조화기 전면

3		공사시행 계획

□ 사업내용

○ 공 사 명 : 잠실제1수영장 공기조화기 교체공사

○ 공사규모 : 공기조화기 467CMH 4대 철거 및 설치, 주위배관 등

○ 사 업 비 : 150,000천원

○ 공사기간 : 착공일로부터 50일

□ 발주방법

○ 공기조화기 구매 : 조달구매(3자단가계약)

○ 잠실제1수영장 공기조화기 교체공사

- 기계설비 공사업 전문면허 업체와 수의계약

4		소요 예산

□ 소요예산 : 147,652천원

○ 공기조화기 구매 : 126,145천원(조달수수료 포함)

○ 잠실제1수영장 공기조화기 교체공사 : 21,507천원(제경비 포함)

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,노후체육시설개보수사업,잠실종합                   운동장․구의야구공원시설개보수,시설비(401-01)

5		추진일정

□ 공사발주 : 2018. 10. 5

□ 공사계약 및 착공 : 2018. 10. 12

□ 공사준공 : 2018. 11. 30

붙임 : 1. 설계도서 각 1부. 끝.