문서번호	도로보수과-8847
결재일자	2018.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	이상희	10/18 신응수

『2018년 노후포장도로 정비공사(2구역) - 북부』

실정보고 검토 보고

2018. 10.

북부도로사업소

[도로보수과]

실정보고 검토 보고

- 2018년 노후포장도로 정비공사(2구역) -북부

우리사업소에서 시행중에 있는『2018년 노후포장도로 정비공사(2구역)』에 대하여 공사추진에 따른 실정보고 검토 보고임.

관련 근거

○ 북부 제18-55호(2018.10.17.) : 건설사업관리용역(실정보고 검토보고서)

공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 노후포장도로 정비공사(2구역) - 북부

○ 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 1,724a

○ 공사기간 : 2018.02.28 ~ 2018.12.31

○ 공사금액 : 금1,049,119,000원

○ 도 급 자 : 아폴로건설(주)  대표 서민정

실정보고

○ 2017년 노후포장도로정비시 구별 경계에서 일부 포장구간 누락된 종암로        (고려대앞교차로 ~ 파리바게트)와 회기로(고려대앞교차로 ~ 정릉천)

노후된 포장구간 추가 반영으로 물량 증 발생

- 종암로(고산자로 중첩, B=18m L=160m, A=29a)

- 회기로(북부도로사업소 관리 B=15m, L=150m, A=23a)

공사비 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비	3,500,000,000	3,629,068,000	증) 129,068,000
도 급 비	1,049,119,000	1,073,468,000	증) 24,349,000
관 급 비	2,027,760,000	2,118,680,000	증) 90,920,000
이 전 비	423,121,000	436,920,000	증) 13,799,000

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 추가분 물량 반영에 따른 부족분(129백만원)은 확보된 서울시 2018년도 노후포장도로 정비공사 예산 추가 재배정(260백만원) 예산을 활용하여 예산범위내에서 선 시행후 설계변경에 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 .

별 첨 1. 건설사업관리용역(실정보고 검토서) 1부.

2. 추가 반영구간 위치도 1부.   끝.