메이커 베이스캠프, G·CAMP 2018년 추진 일정

○ 추진 일정

일 정	메이커 스페이스 구축	메이커 스페이스 운영
9월	◦SBA TFT 조직구성, 메이커아카데미 인력 단계적 투입 (완공전 근무지 : 구로 서울시창업지원센터 4층)
9월	◦안전진단 ◦보강 설계 및 건축 설계	◦기본 방향설정 ◦입찰 장비 세부스펙서 작성 ◦교안/매뉴얼 제작
10월	◦보강 설계 및 건축 설계 (계속) ◦입찰공고 및 계약 (보강공사 및 건축공사) ◦보강공사 및 건축공사 ◦설계(기계, 전기, 소방, 통신) ◦입찰공고 및 계약 ◦장비발주 (1차, 데스크톱 장비, 소프트웨어)	◦웹사이트 구축 ◦페이스북 팬확보 (1,000명) ◦예약시스템 협의(한국과학창의재단) ◦온라인 동영상 제작 등 진행 ◦워크숍 운영 ◦네트워킹 행사
11월	◦보강공사 및 건축공사 (계속) ◦장비반입 ◦설계(기계, 전기, 소방, 통신) (계속) ◦입찰공고 및 계약 (기타 공사) ◦장비발주 (2차, 대형)	◦온라인 동영상 제작 등 진행 ◦워크숍 운영 ◦네트워킹 행사 ◦C-Camp 프로젝트 1기 모집
12월	◦기타 공사	◦워크숍/세미나/해커톤 진행 ◦C-Camp 프로젝트 1기 진행 ◦온라인 동영상 제작 등 진행
19.1월	◦기타 공사 (계속) ◦장비반입 및 이송 ◦준공 ◦개소식 및 운영	◦장비 검수 및 시운전 ◦워크숍/세미나/해커톤 진행 ◦C-Camp 프로젝트 1기 진행 ◦시작품 제작지원 ◦온라인 동영상 제작 등 진행
19.2월	◦운영 (계속)	◦워크숍/세미나/해커톤 진행 ◦데모데이, 크라우드 펀딩 진행 ◦시작품 제작지원 ◦온라인 동영상 제작 등 진행 ◦C-Camp 프로젝트 1기 진행 ◦C-Camp 프로젝트 2기 모집
19.3월		◦워크숍/세미나/해커톤 진행 ◦C-Camp 프로젝트 2기 진행 ◦시작품 제작지원 ◦온라인 동영상 제작 등 진행

○ 진행상황 (9.20 현재)

- (시설) 보강 설계 및 건축설계

- (운영) 프로그램 구성, 네트워크 구축