안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		토목처장
(경유)
제목	일원역 내부 엘리베이터 설치 협약안 변경에 따른 의견회신

1. 관련근거

가. 예산처-1078('18.3.19.)『2018년도 예산운영계획 알림』

나. 토목처-23444('18.10.17.)『일원역 내부 엘리베이터 설치 협약안 변경에 따른 의견조회』

2. 삼성생명보험주식회사에서 시설물 무상기증 예정인 지하철 3호선 일원역 내부 엘리베이터 설치공사와 관련, 귀 부서에서 요청한 변경 협약안 검토요청에 대해 우리부서의 검토의견을 송부하오니 업무에 참고 바랍니다.

○ 검토 요청안

당 초(‘18.8.20)	변 경(‘18.9.28)
□ 특약사항 제13호 사업시행자는 공사 중 진동, 소음으로 인해 역 구내 근무자에게 피해가 발생되지 않도록 공사 관리할 의무가 있다. 교통공사 관련부서의 요청이 있을시 교통공사는 사업시행자와 대체 숙박비 등을 당사자에게 지급하는 것에 대해 협의할 수 있다.	□ 특약사항 제13호 사업시행자는 공사 중 진동, 소음으로 인해 역 구내 근무자의 피해가 최소화 되도록 공사 관리할 의무가 있다.

○ 검토의견

- 변경안에 주간공사만 가능토록 특약사항 추가

- 불가피하게 야간공사 시엔 서울교통공사 내부기준에 의거해 임시숙박비 지급토록 명기

※ 서울교통공사 임시숙박비 지급기준(2018년도 예산운영계획 참조)

· 지급근거 : 역사 내 소음공정작업 등 야간 공사시 임시숙박비 사용 기준 통보, 예산처-3330(‘17.10.11.)

· 지급기준

- 심야 휴게시간대로 지정된 침실에서 휴게를 취하기 곤란한 경우, 사장-35(‘05.3.8.)

- 절단, 파쇄, 천공, 철거 등으로 소음 진동 발생시(30분 이상 지속되는 경우)

구분	공사범위	소음측정결과	비고
직상･하층	반경 50m 기준	46db	소음･진동의규제법시행규칙 제20조의③ : 45dB이하
침실층	반경 100m 기준	47db

· 기준금액 : 70천원(1인 1실 기준) × 일수 × 실.  끝.

	역사지원처장
주임		처장	10/19
협조자
시행	역사지원처-22462	(	2018.10.19.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 346	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9594	/전송		/	jslee@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격