＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 재계약 의뢰(금화초등학교외 24개소 아리수 음수대 배관설치공사)

우리사업소에서 시행중인『금화초등학교외 24개소 아리수 음수대 배관설치공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 변경 계약을 의뢰 합니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 금화초등학교외 24개소 아리수 음수대 배관설치공사

2) 공사기간 : 2018.08.09.~ 2018.12.06.

3) 규    모 : D=15~40㎜, L=562m

4) 계약업체 : ***************

가. 설계변경 사유 : 공사현장 여건 변동으로 인한 물량 증감 및 추가 시공 발생

나. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, (음수대설치 배관공사비), 수선유지교체비(지원사업성시설비)

다. 설계변경내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
도급액	공급가액	**********	**********	***********
	부 가 세	*********	*********	*********
	합 계	**********	**********	***********

붙임 : 1. 설계변경 시행 방침서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 결과보고 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의위원 의견결과서 1부.

5. 변경합의서 1부.  끝

	급수운영과장
주무관	박윤정		주무관	김승완		급수운영과장	10/25 이병운
협조자
시행	급수운영과-19656	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 서부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(7)