자문 검토 의견서

○ 개봉철도고가 바닥판 교체공사

안 건	검 토 의 견
개봉철도고가 바닥판 교체공사	1. 현재 기 진행중인 오류IC 인근 남부순환로 공사내용을 반영하여 교통소통대책 수립 필요 1) 공사 완료시기(3단계 이후는 준공되는지 확인), 차로운영계획 2) 공사장 안내표지판 등 2. 1단계 남부순환로95길에서 남부순환로로 합류하는 합류테이퍼 연장이 감소하므로 안전시설 및 안내표지판 설치할 것. 3. 2단계 및 3단계 1) 가설교량 상부 공사시 도면상 각 공사장비(공사차량 및 크레인 등)을 배치 지점에서 어느 경간까지 어떻게 가설하는지 등 상부공사 방법에 대해 심의시 상세 설명을 하여 주시기 바랍니다. 2) 3-1단계, 3-2단계 구로IC->경인로 서울방향의 진출로 차로폭이 감소하므로 차량안내 및 안전시설 설치할 것. 4. 4-2단계, 9-2단계, 9-3단계 공사점용으로 인해 한영신학대학교 방면 우회전만 되는 차로는 사전에 직진이 금지됨을 안내하기 바람 5. 5단계 1) 공사 진행방향과 차량진출입 동선을 제시하여 주시기 바랍니다. 2) 공사 진행방향에 따라 공사 시점부와 공사 종점부에 장비(철거 및 운반)배치를 통하여 점용면적의 적정성을 검토하여 주시기 바랍니다. 3) 5, 6단계 차로운영 변경에 따른 충분한 안내로 급차로 변경 등에 따른 안전사고 예방할 것. 6. 7-1단계, 7-2단계, 8단계 1) 가설교량 상부공사와 동일하게 도면상 각 공사장비(공사차량 및 크레인 등)의 배치 지점에서 어느 경간까지 어떻게 기설하는지 등 상부 거더의 철거 및 가설 공사방법에 대해 심의시 상세 설명을 하여 주시기 바랍니다. 2) 7-1 주간 대비 7-2 야간 단계에서 1개차로 추가점유가 필요한 공사내용에 대한 상세한 설명과 야간 공사시 공사 시점부 차량에 대한 안전대책으로 완충구간 추가 확보 또는 충격완화시설 추가 설치 검토, 특히 신월IC→공사구간 진입방향에 대한 공사안내 입간판 계획 제시요망 3) 7-1단계 공사점용으로 인한 신월IC->구로IC 방면 차로폭에 대한 상세설명 요망 4) 8단계 시흥IC 방향 램프 폐쇄시 우회안내는 신월에서 오류IC 이전에 안내하여 오류IC에서 경인로를 통해 사전에 우회하도록 분산대책 필요 5) 8단계 부천->구로IC방면 합류테이퍼 연장 추가 확보 방안 검토할 것. 7. 9-1, 2, 3단계의 경우 선형이 불량한 가교위에서 1개차로 감소시키는 것 보다는 가교 진입 이전에 1차로로 정리하여 진입하는 것이 안전상 유리할 것으로 판단되므로 교통량을 감안하여 대안 제시바람 8. 11단계 A-A’구간 상세운영계획 제시할 것. 9. 6단계, 10-1단계 공사시 공사점용으로 인해 직진이 불가하므로 고가도로 구간에서 미리 도류화하고 안전대책 마련 10. 11단계 공사시 A-A’단면도와 도면이 일치하지 않음 11. 남부순환로는 비교적 통행속도가 높으므로 공사시 노면관리 철저히 할 것. 12. 야간공사는 충분한 조명설치 등으로 단시간에 급격한 교통운영체계변경에 따른 안전사고 예방할 것.

2018. 11. 01