등록번호

도시재생과-2873

주무관

신촌연희도시재생팀장

도시재생과장

도시재생추진단장

등록일자

2018.11.6.

문정일

김경민

박성주

11/07

박홍표

결재일자

2018.11.7.

공개구분

대시민공개

협  조

창천동 담벼락마을, 바람산마을 마을공간개선사업

기본 및 실시설계 용역

용역기간 연장 계획

서 대 문 구

도시재생과

창천동 담벼락마을, 바람산마을 마을공간개선사업

기본 및 실시설계 용역

용역기간 연장 계획

창천동 담벼락마을, 바람산마을 마을공간개선사업 설계 용역 추진과정에서 지연사유가 발생함에 따라 용역기간을 연장하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□  마을공간개선[경관협정] 마스터플랜 기본 및 실시설계 용역 시행 변경계획(안)

(지역활성화과-7470, ‘18.5.25.)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 제7절 제2호(계약기간의 연장)

Ⅱ		용역 개요 및 추진경위

□ 용역개요

○ 용 역 명: 창천동 담벼락마을, 바람산마을 마을공간개선사업

기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간: 2018. 7. 17.~ 11. 13.(120일)

○ 용역금액: 금107,442천원

○ 용역업체: ㈜서우티이씨, ㈜종합건축사사무소 예다씨엘케이

□ 추진경위

○ 2018.05.25.: 마을공간개선 마스터플랜 계획(안) 방침 수립

○ 2018.06.08.: 마을공간개선 설계 용역 시행

○ 2018.07.20.: 착수 회의(총괄MP, 센터장 자문)

○ 2018.10.25.: 서울시 도시디자인위원회 심의

Ⅲ		용역기간 연장

□  용역기간 연장: 30일

□  연장에 따른 귀책소재: 계약상대자의 책임 없는 사유에 해당

□  지연배상금 부과여부: 미부과

□  내    용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
용역기간	’18. 7. 17. ~11. 13. (120일)	’18. 7. 17. ~12. 13. (150일)	30일 연장
용 역 비	107,442천원	107,442천원	변경없음

□  사    유

○ ’18.10.25. 창천동 담벼락마을, 바람산마을 마을공간개선사업 기본 및

실시설계(안)에 대한 서울시 도시디자인위원회 심의가 있었으며,

’18.11.2. 심의 결과가 통보 됨(심의결과: 재심의)

○ 심의 결과에 따른 서울시 도시디자인위원회 재심의 자료 작성,

재심의(예정: ’18.11.22) 및 재심의 결과를 기본 및 실시설계에

반영하기 위한 용역기간 절대 부족

Ⅳ		향후 계획

○ 2018. 12월.: 창천동 마을공간개선 설계용역 준공

○ 2019. 02월.: 공사 발주 및 계약

○ 2019. 03월~11월.: 공사 착공 및 준공

붙   임   1. 준공기한 연기의뢰 공문 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 공기연장 공정표 1부.  끝.