문서번호	시설과-6852
결재일자	2018.11.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장		관리부장
백강석	조대복	오임석		11/08 심상원
협 조	전략기획실장		유연호
	총무과장		이행용

『서울대공원 잡용수 배관 교체공사(3단계)』

설계변경 검토 보고

2018년 11월

서 울 대 공 원

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『서울대공원 잡용수 배관 교체공사(3단계)』

설계변경 검토 보고

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계)』시행중 현장여건을 일부 반영하지 못한 공정과 배관 철거공사에서 밸브류 가스켓에 함유된 폐석면 처리에 대하여 설계변경을 추진코자 함

Ⅰ		추진근거

서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계) 추진에 따른 실정 보고

시설과-6368(2018.10.18)

서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계) 추진에 따른 실정 보고(2차)

시설과-6493(2018.10.23)

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 서울대공원 잡용수배관교체공사(3단계)

공사기간 : 2018. 07.27 ~ 2018. 11.23

시 공 사 :******************)

계약금액 : *************

주요 공사내용

- 집용수배관 교체 : 1.99km(100A ~ 250A)

- 잡용수배관 철거 : 4.79km(80A ~ 400A)

- 큰물새장 기계실 기계설비 및 배관 철거 1식

- 기   타 1식

Ⅲ		설계변경내용

주요 변경내용

구 분	당 초	변 경 후	공사비 증감
계			***********
배관설치공 사	- ***************************************************** *********************************** ****************	- ********************************************************************** ********************************************************************************************* **************	**********
배관철거공 사	*****************************	*****************************************************************	***********
기계실배관 철거공사	*********************	**************************************	**********
기 타 제경비			**********

세부 변경내용

- 도급비 변경(증가) : ************

구 분	당 초	변 경	증감액(원)	변경사항	비 고
계	***********	***********	***********
재료비	***********	***********	**********	현장여건 반영에 따른 재료비 증가
노무비	***********	***********	***********	절관 물량 증가로 직․간접노무비 증가
제경비	***********	***********	**********	물량증가에 따른 제경비 반영
기 타	***********	***********	********	지정폐기물운반 처리비 반영
부가세	**********	**********	**********

Ⅳ		예산 검토

예산집행계획

- 증가되는 공사비는 서울대공원 잡용수배관교체공사(3단계)의 낙찰차액을 활용 설계변경 계약 추진

․ 낙찰차액 : ***********

예산과목

- 공원이용시민 만족도향상, 동물사 관리기능 및 야생동물종보전,

공원안전시설보수 및 정비, 시설비(서울대공원 지하구 잡용수배관교체)

Ⅴ		보고자 의견

**********************************************,

****************************************.

- 계약금액 변경

․변경 전 : ************

․변경 후 : **************************

- 계약기간(공사기간) 연장

․ 변경 전 : ***********

․ 변경 후 : *****************

※ ******************************

준공시 물량 증감에 대한 실사를 철저히 한 후 설계변경(정산)코자 함

Ⅵ		행정사항

설계변경에 따른 계약 : 총무과

- 도급계약액 변경(증가) :************

- 계약기간(공사기간) 연장 : ***************

붙임 : 1. 서울대공원 잡용수배관교체공사(3단계) 추진에 따른 실정 보고 1부.

2. 서울대공원 잡용수배관교체공사(3단계) 추진에 따른 실정 보고(2차) 1부.

3. 서울대공원 잡용수배관교체공사(3단계) 설계(변경) 내역서 1부

4. 합의각서 1부.  끝.