문서번호	소방행정과-16309
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	홍보팀장	소방행정과장		소방서장
안정미	이광섭	최홍균		11/12 김시철
협 조
	담당자		조성호

c

= 지진체험장 중심의 스토리텔링 도입 =

소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충 공사(건축) 완공 결과보고

강남소방서

(홍보교육팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

c

= 지진체험장 중심의 스토리텔링 도입 =

소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충 공사(건축) 완공 결과보고

◈ 지진체험을 중심으로 각종 재난유형 상황을 이야기(Story)화 하여 체험 중심으로 몸으로 익히는 소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충 공사 결과를 보고임

Ⅰ		추진근거

○ 소방기본법 제17조, 재난 및 안전관리 기본법 제70조

○ 소방행정과-3565(2018.3.7.)호『강남소방서 소방안전교실 콘텐츠

보강 및 확충 계획』

○ 소방행정과-8599(2018.6.11.)호『소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충       설치공사 발주계획』

○ 소방행정과-15194(2018.10.19.)호『완공검사(주)조사(소방안전교실

콘텐츠 보강 및 확충공사 건축)』

○ 소방행정과-15796(2018.11.2.)호『소방안전교실 콘텐츠 보강 및         확충설치공사(건축) 준공정산 보고』

Ⅱ		추진경과

○ 소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충 공사 추진계획 수립(‘18.3.7.)

○ 소방안전교실 보강 및 확충공사 실시에 따른 설명회(‘18.3.12.)

○ 기술용역타당성 심사 결과 통보(‘18.3.20.)

○ 소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충공사 설계용역((‘18.4.17.~5.16.)

○ 소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충공사(전기)((‘18.7.6.~10.15.)

○ 소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충공사(건축)((‘18.8.1.~10.19.)

Ⅲ		건축공사 내역

○  공 사 명 : 소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충공사(건축)

○ 공사위치 :강남소방서 2층 소방안전교실

○ 공사업체 : 실내건축-(주)비아엔진니어링, 모의시스템-(주)세이프인

○ 공사기간 : 2018.8.1.~2018.10.11.

○ 준공정산금액 : 금109,610,759원(783,241원 감액)

※준공금액 원단위 이하 절사 신청 금109,610,750원

내 역	㈜ 비아엔지니어링			㈜세이프인
	계약금액	정산금액	증감액	계약금액	정산금액	증감액
산업안전보건비	481,154	0	-481,154	2,268,297	2,226,840	-41,457
환경보전비	49,294	0	-49,294	232,387	232,387	0
건설하도급대금지급보증서발급수수로	13,309	0	-13,309	62,744	0	-62,744
건설기계대여대급지급보증서발급수수료	11,502	0	-11,502	54,223	0	-54,223
공급가액	17,562,780	17,007,710	-55,070	82,795,962	82,638,435	-157,527
부가가치세	642,094	470,772	-55,210	8,279,596	8,263,843	-15,753
합 계	19,318,950	18,708,481	-610,469	91,075,050	90,902,278	-172,772

Ⅳ		예산집행내역

○ 사업예산 : 금145,000,000원(금일억사천오백만원)

※ 예산과목 : 시민생활안전 지원 서비스 확대/재난교육 및 훈련/

우리동네 소방안전체험교실/소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충 / 시설비

- 설계용역 : 금 6,804,500원(금육백팔십만사천오백원)

- 전기공사 : 금10,388,350원(금일천삼십팔만팔천삼백오십원)

- 건축공사 : 금109,610,750원(금일억구백육십일만칠천오백구원)

- 사업잔액 : 금18,196,400원(금일천팔백일십구만육천사백원)

Ⅴ		소방안전교실 완공사진

▶ 소방안전교실 입구	▶ 지진체험장(연기대피로 포함)
▶ 생활안전체험(문어발콘센트체험)	▶연기대피로 출입구 ▶VR체험(기존장비 사용)
▶소방안전 6가지 약속, 완강기체험, 소방시설체험	▶직업체험
	▶ 소방안전교실 오리엔테이션장 ※ 바닥은 아이들에게 소방차 길터주기 교육을 할 수 있게 차선이 그려져 있음

붙임 1. 완공검사(주)조사(소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충공사 건축) 1부

2. 소방안전교실 콘텐츠 보강 및 확충설치공사(건축) 준공정산 보고  1부.

3. 공사감독일지 4부.  끝.