서울시 도시철도 9호선 3단계 종합시험운행 결과 보고서

2018.11.18

서울특별시 도시기반시설본부

목   차

Ⅰ. 목 적	1

Ⅱ. 관련 근거	1

Ⅲ. 종합시험운행 추진 절차	1

Ⅳ. 종합시험운행 개요

1. 사업개요	2

2. 시험일정	2

3. 시험구간	2

4. 시운전열차 종류 및 운행횟수	4

5. 시험팀 구성	4

Ⅴ. 종합시험운행 시험항목 및 평가

1. 시험항목	5

2. 평가 및 판정기준	6

3. 상세절차	11

Ⅵ. 철도시설 기준기준 관련 시정·개선사항 조치결과	13

Ⅶ. 종합시험운행 시험결과

1. 시설물검증 시험결과	14

1-1. 분야별 세부 시험결과	14

1-2. 분야별 장애사항 조치결과	16

1-3. 분야별 세부 장애사항 조치결과	16

1-4. 분야별 세부 개선사항 조치결과	16

2. 영업시운전 시험 결과	17

2-1. 분야별 세부 시험결과	17

2-2. 분야별 개선사항 조치결과	19

2-3. 분야별 장애사항 조치결과	19

Ⅷ. 종합의견	19

도시철도 9호선 3단계 종합시험운행 결과 보고

Ⅰ		목 적

❍ 철도시설물의 정상작동여부 확인과 전동차와의 연계 적합성을

확보하고, 열차운행체계 적정성 및 철도종사자 업무숙달 등을

관련법규 및 시험절차에 따라 검증하여 9호선 3단계 연장 구간을

개통하는데 있음.

Ⅱ		관 련 근 거

❍ 철도안전법 제38조와 같은법 시행규칙 제75조

❍ 철도종합시험운행 시행지침(국토교통부 고시 제2017-149호, 2017. 3.10)

Ⅲ		종합시험운행 추진 절차

공종별 시 험 (제8조)	⇨	사 전 점 검 (제9조)	⇨	철 도 시 설 기 술 기 준 적 합 검 토 (제18조)		종합시험운행(60일 이상)
						(한국교통안전공단 입회, 확인)
					⇨	시설물검증시험 (제13조, 별표2)	⇨	영업시운전 (제14조,별표3)
						철도시설관리자 시행		철도운영자 시행

-1-

Ⅳ		종합시험운행 시행 개요

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 9호선 3단계 건설공사

나. 사업기간 : 2009.12 ~2018.12

다. 사업구간 : 종합운동장역 ~ 올림픽공원역 ~ 보훈병원

라. 개통예정일 : 2018. 12. 1

2. 시험일정

구 분	기 간	주 요 내 용
시 설 물 검증시험	‘18. 6.27.∼ 7.27. (23일)	단계별 증속운행시험 선로 최고속도로 운행하면서 차량과 시설물간 인터페이스, 운행적합성 등 검증
영 업 시운전	‘18. 8.11.∼ 11. 5. (72일)	신호, 통신 등 열차제어시스템의 연계성 점검 철도종사자의 업무숙달 점검 운영설비 및 여객 편의설비 등 점검

3. 시험구간

가. 규 모 : 시스템분야 총연장 9.14㎞, 정거장  8개소(환승역 2개소)

나. 노선약도

-2-

다. 주요 시설물

구 분	주 요 시 설 물 현 황	비 고
토 목	- 터 널 : 9.18km - 역 사 : 8개 정거장
궤 도	- 궤 도 : 19.5km - 분기기 : 23틀
건 축	- 931역(8,644㎡),932역(6,841㎡), 933역(10,105㎡),934역(7,833㎡), 935역(8,848㎡),936역(8,823㎡), 937역(7,505㎡),938역(9,105㎡)
송변전	- 수전선로(터널) : 22.7km 송배전선로 : 156.4km, 22.9kV 변전소 : 3개소 - 변전장비 130면
전차선	- 강체전차선 : 21.2km(AL T-bar)
일반전기	- 역사전기실 : 8개소, 257면(정거장 전기설비)
신 호	- 신호기계실 3개소, - 신호케이블 123.5km, 신호기 37기 - 궤도회로 114개소 선로전환기 21개
통 신	- 열차무선케이블 17.7km - 열차무선설비, 역무자동설비 전송, 방송, 영상, 열차행선안내시스템
기계설비	정거장 PSD 8개소 - 엘리베이터 : 33대 에스컬레이터 : 97대

-3-

4. 시운전열차 종류 및 운행횟수

가. 시설물검증시험

○ 시운전열차 : 전동차(4량 1편, 6량 1편성)

○ 운행시간 : 09:00~18:00(토,일,휴일 제외)

○ 운행횟수 : 총1,058회

나. 영업시운전

○ 시운전열차 : 전동차 37편성(4량, 6량)

항 목		영업시운전		비 고
		1단계 기간	2 단계(토,일,휴일 포함)
시험기간		‘18. 8.11 ~ 10. 5(42일)	‘18.10. 7 ~ 11. 5(30일)	총운행 13,614회
열차 운행	시 간	09:00~18:00	05:00~24:00
	횟 수	574회	13,040회
	열차수	105개	1,030개

5. 종합시험운행팀 구성

가. 팀 장 : 도시철도설비부장

나. 구 성 : - 시설물검증시험 19명(서울시 본부 9명, 서울메트로9호선

운영(주) 10명)

- 영업시운전 7명(서울9호선운영(주) 관제센터)

			종합시험팀
			도시철도설비부장
	시설물검증시험반							영업시운전반

-4-

다. 임 무

구 분	임 무
팀 장	- 시설물검증시험, 영업시운전 시행계획 수립·시행, 결과보고 등 종합관리 - 시설물검증시험 시운전열차 운행계획 수립·시행 - 시설물검증시험, 영업시운전 관련 기관별/분야별 인터페이스 협의·조정
반 장	- 철도시설관리자와 철도운영자 종합시험관련하여 협의 - 종합시험운행 참여자 교육시행 - 시설물검증시험, 영업시운전 시운전열차 고장 및 이례사항 발생 시 정거장 운전취급자 등 관계기관 연락 및 종합시험팀장에게 보고
시험자	- 시설물검증시험 등 시운전열차 운행 전 정거장취급자와 시운전열차 운행에 관한 협의 - 탑승자 통제, 출입문 개폐 등 운행 전 시운전열차 안전상태 확인 - 시설물검증시험 등 시운전열차 운행 전 급전상태 및 운행진로 확인 - 시설물검증시험 등 시운전열차 고장 및 이례사항 발생 시 반장에게 보고 - 시설물검증시험 및 영업시운전 시험 - 시설물검증시험, 영업시운전 일지 작성, 시험결과 제출 - 시운전열차 지원자, 기관사에게 시험개요, 운전취급 특이사항 사전설명
지원자	- 시설물검증시험 및 영업시운전 시행시 시험자에게 현장안내, 시스템설명, 설계도서 및 각종도면 제공 등 지원

Ⅴ		종합시험운행 시험항목 및 평가

1. 시험항목

가. 시설물검증시험

계	선로	전철전력	신호	관제
				TTC	SCADA
97	4	5	12	66	10

나. 영업시운전

분 야	시험항목	세부항목	비 고
운 전	4	11
영 업	7	21
계	11	32

-5-

2. 평가 및 판정기준

가. 평가기준

○ 시설물검증시험

시 험 항 목		시 험 내 용	시험 및 평가기준
가. 선로시설		○ 궤도 성능시험 ○ 궤도 검측 ○ 육안검사 ○ 레일탐상	시설물검증 시험 절차서의 평가기준에 따른다
나. 전력설비		○ 전차선 비디오 모니터링 시험 ○ 전철변전소 특성시험 ○ 전철변전소 유도장애시험 ○ 레일전위측정시험 ○ 연장급전시험
다. 신호 및 열차제어 설비		○ 정위치 정차(SSP) 검증(4량) ○ PSD 시스템 시험(4량) ○ STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(4량) ○ ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(4량) ○ 정위치 정차(SSP) 검증(6량) ○ PSD 시스템 시험(6량) ○ STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(6량) ○ ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(6량) ○ Global Test 시험 ○ 출입문 개방 방향 확인 ○ 역 무정차 통과(Skip Station) 확인 ○ 연속진로(Fleet, Cycle) 설정시험
라. 관제설비
1	TTC 관제설비	○ 운전관제장치 설치시험 ○ 신호컴퓨터실 장치 설치시험 ○ 통신망 장치 설치시험 ○ 전원장치 인가 시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항
2	관제실과 현장설비간 Interface	○ 운전관제 설비분야 - 시스템 기능 확인 - 열차운행 제어관리 기능 확인 - 스케쥴 기능 확인 - 외부 인터페이스 기능 확인 ○ 신호설비 분야 - 신호/유지보수 콘솔 기능 확인 - 운전관제실 장비 운용시험 - 시스템별 운용상태 확인 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항

-6-

시 험 항 목		시 험 내 용	시험 및 평가기준
3	시스템 기능 (S/W) 시험	○ TTC기본 S/W 기능시험 ○ 열차운행관리 S/W 기능시험 ○ 열차운전관리 DB 기능시험 ○ 업무지원 S/W 기능시험 ○ 기타 필요사항	시설물검증 시험 절차서의 평가기준에 따른다
4	시 스 템 제어시험	○ 역 모드 전환 제어 기능시험 ○ 선로전환기 전환 제어 기능시험 ○ 진로제어(신호기 제어 포함) 기능시험 ○ TTC, CTC(L/S)에서 열차운행 제어관리 ○ 기타 필요사항
5	스케쥴 관련 이상 유무 확인	○ 스케쥴 표시상태 확인 - 온라인 스케쥴 실행 및 변경상태 - 스케쥴 관련 인쇄상태 ○ 실적 출력상태 확인 - 열차운행실적 출력물 상태 - 각종 통계조회 및 보고서 출력상태 ○ 기타 필요사항
6	열차운행 제어상태 확 인	○ 궤도점유상태 확인 ○ 열차번호 이동기능 및 열차 번호 창 적정 유무 ○ Line-up 기능 확인 ○ 자동진로(Auto) 기능 확인 ○ 역 정보 등 표시상태(LDP/LS)확인 ○ 서버기능 확인 ○ 열차스케쥴 조정시험 ○ 열차위치 추적시험 ○ 기타 필요사항
7	관제 설비간 인터페이스 시험	○ 열차행선안내장치 시험 ○ 전차선 급․단전 표시 시험 ○ 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항
8	주전송설비	○ 각종 유니트 LED 점등상태 ○ 각종 관제회선 경로 구성 적정성 및 회선 품질상태 ○ 주요기기 이중화부 동작상태(통신선로 절체 포함) ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 통신설비(데이터, 음성) 회선 경로구성 상태 확인 ○ 관제와 현장 간 광케이블 주/예비 절체시험 ○ 기타 필요사항(전원 이중화 구성 확인)

-7-

시 험 항 목		시 험 내 용	시험 및 평가기준
9	종합영상 설 비	○ 콘솔 및 모니터 동작상태 ○ 영상저장 및 검색기능 시험 ○ 카메라 제어 기능유무 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항(차량객실감시장치 영상표출 확인)	시설물검증 시험 절차서의 평가기준에 따른다
10	관제전화 설 비	○ 주장치, 운영장치, 유지보수장치 개별 동작 상태 ○ 음성저장 및 검색 가능유무 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항
11	열차무선 시 스 템	○ 관제실, 역사, 열차 간 통화상태 ○ 설비장애 및 통신 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항(전원 이중화 구성 확인)
12	통합교환설비	○ 가입자간 호출, 통화상태 ○ 유지보수장비 기능상태 ○ 설비장애 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항
13	통합망 관리 시 스 템	○ 통합망 관리시스템 기능상태 확인 ○ 설비별 EMS 등 기능 시험 ○ 설비별 성능관리, 장애기능 확인 ○ 기타 필요사항
14	기 타	○ 지하역사 CCTV, 화재탐지설비연동 및 경보 표출확인 ○ 관제원격방송장치 기능시험 ○ 연선전화기 시험
15	SCADA설비 기능 시험	○ 주컴퓨터 및 통신제어장치 기능 확인 ○ 원격전력 제어 기능 확인 ○ 외부 인터페이스 데이터 전송 기능 확인 ○ 운용자 및 유지보수자 콘솔기능 시험 ○ 계통반 표출기능 확인 ○ 원격제어소 장치의 자료취득 및 제어 기능 확인 ○ 단로기(차단기) 원격제어 시험 ○ 단로기(차단기) 상태에 따른 급전여부 전송시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항

-8-

○ 영업시운전

가. 운전(Operation)
점검항목	시험내용	시험 및 평가기준
운전시간	◦ 운전매뉴얼 철도차량운전자 출고 기능검사 및 시간측정	영업시운전 시험절차서의 평가기준에 따른다
	◦ 정차역 정차시간 검토 ◦ 역 구간별 운전시분(여객100% 승차 시)
	◦ 종착역 도착 후 반복시간 산정
열차운영 계획 스케줄 점검	◦ 연속열차 운행 시 최소운행시격 ◦ 열차반복 사용 시 설정된 반복시간 ◦ 역 도착선 도착 후 출발선 전선시간
철도차량운전자 노선숙지	◦ 철도차량운전자 운행노선 인지를 위한 주․야간 숙지훈련
이례사항 대처능력 및 운행안전	◦ 탈선 운전사고 발생시 열차소통 방안 ◦ 열차화재시 여객대피 방안 ◦ 유관기관 출동시간 및 역할분담 등 협력체계 점검

-9-

나. 영업(Commercial Business)
점검항목	시험내용	시험 및 평가 기준
여객 접근로 및 동선	◦ 지하철, 버스, 주차장 접근로 점검 ◦ 접근노선 장애요소 파악 및 보완 ◦ 역사내 환승시설 설치 및 보완 ◦ ES, MW, 엘리베이터 점검 및 혼잡도 ◦ 장애인 이동로 확보여부 점검 ◦ Carter 이동 여부 점검	영업시운전 시험절차서의 평가기준에 따른다
여객 승하차	◦ 자동 개·집표기 작동상태 점검 ◦ 게이트 통과후 정해진 좌석 이동시간 측정(장애인 포함) ◦ 열차 정차표지 설치 확인 및 위치 조정
열차정보	◦ CTC와의 열차운행관련 정보 송․수신 점검 ◦ 출․도착 홈 안내게시기 표출 ◦ 자동방송장치의 방송점검 ◦ 객실 안내방송 및 표시기 표출
역무점검	◦ 고객안전원 배치 및 교육 ◦ 역무자동화시스템 운용 점검
여객 안전설비	◦ 계단, 에스컬레이터, 엘리베이터 전기설비 점검 ◦ 승강장 안전상의 장애요인 점검 및 방화시설 점검
안전 및 보안대책	◦ 영업운행안전관리 계획 점검 ◦ 안전 및 보안관련 소요설비 검토 및 확보
기타 영업서비스 준비사항점검	◦ 역시설물 및 편의시설 점검 - 대합실․승강장의자, 콘코스 휴게실, 화장실 점검 - 여행정보안내기, TV, 전화 등 편의설비 적정배치 - 역무시설 및 공간 점검 - 상업 및 공공시설 점검 - 차내비품 검검 및 공급시간 - 공기조화설비, 환기설비, 급배수설비, 위생설비, 자동제어 ◦ 열차내 비품공급체계 점검

-10-

나. 시험결과 판정기준

○ (적  합) 시험기준에 적합한 경우

○ (부적합) 시험기준에 부적합한 경우

○ (보  완) 시험기준에는 미치지 않으나, 열차안전운행에 지장이 없는

경미한 사항으로 영업개시 이전에 보완이 가능한 경우

다. 부적합사항 등의 처리

○ (부적합사항) 조치완료 후 재시험

○ (보완사항) 시험기간 내에 조치(종합시험팀에서 확인)

* 부적합 및 보완사항은 그 기준(관련 규정, 지침 등)과 필요성 등을 쉽게

파악할 수 있도록 기록(필요한 경우 현장사진, 도면 등 첨부)

3. 상세절차

가. 시설물검증시험

○ 시운전열차를 운행하면서 시험항목별 시험절차서에 의거 시설물과

차량간의 운행적합성, 시설물 기능·성능 등을 확인

○ 시운전 열차의 선로 최고 운행속도(80㎞/h 이하)로 시행(단, 시험

항목 특성에 따라 시운전 열차속도 조정)하면서 분야별로 시설물과

차량간의 운행 적합성, 시설물 기능·성능 등을 확인

* 해당 시험일 첫 왕복 25㎞/h로 운행하고, 이후 선로 최고 운행속도

○ 무선통화는 차상통화(TRS 무전기)로 한다.

○ 운전취급

- 시운전열차는 1~2단계 구간은 관제센터 관제사의 통제하에

운전하고, 3단계 구간 진입전 기관사는 3단계 시운전상황실로

무선통화(TRS 무전기)하여 급전요청 및 급전 확인후 3단계

구간으로 진입.

-11-

- 시운전열차에 대한 진로제어 등 정거장 운전취급은 시험자(신호

담당)의 통제하에 신호운전취급실(931역 연동)에서

시공사가 실시

↳ 3단계 신호운전취급실(931역)의 신호제어 PC를 이용한 가상

절체기 프로그램 INOVA를 2단계와 연결 조작하여 시험 진행.

- 기관사는 시운전상황실 및 시험자(신호담당)의 통제에 따라

시운전 열차 운전

○ 전차선 급단전 취급은 시운전상황실 통제 하에 각 변전소 전기안전

관리자가 실시

- 전차선은 시설물검증시험 시간에 급전하고, 시험 완료후 단전 실시

나. 영업시운전

○ 점검방법

- (운전분야) 시운전 열차를 운행하면서 열차시운전 시분 측정

및 열차운행체계의 적정성 및 철도종사자(기관사, 승무원 등)

업무숙달을 위한 선로 적응훈련 시행 여부 확인

- (영업분야) 시운전열차를 운행하면서 여객접근로 및 동선, 열차

정보, 여객안전설비 등 영업에 따른 안전, 편의시설 등이

적정한지 여부  확인

○ 운전취급

- 시운전열차의 운전취급은 서울메트로9호선운영(주)와 서울

9호선운영(주)의 영업일정계획에 따라 서울9호선운영(주)이

시행

○ 무선통화는 차상통화(TRS 무전기)로 한다.

○ 전차선 급단전 취급

- 전차선 급단전은 9호선 1단계 관제센터(SCADA)에서 시행

- 전차선은 상시 급전하고, 영업시운전 종료후 단전 실시

-12-

Ⅵ		철도시설 기술기준 관련 시정· 개선사항 조치결과

구 분	제 목		조치 완료일
시정명령 (4건)	①	신호분야 공종별시험 완료 필요	18. 6.10
	②	분기기 재조정 필요	18. 6.12
	③	934 승강장 공사 조속 시공 완료 필요	18. 6.13
	④	정거장 소방설비 시공 완료 필요	18. 6.20
개선사항 (14건)	①	터널로 통하는 진입로 확보	18. 6.24
	②	본선 비상대피통로 내 안전시설물 보완	18. 6.18
	③	단선 병렬터널 횡갱 교차통로 단차 제거	18. 6.22
	④	본선 비상대피통로 표지판 설치 및 비상유도 표지판 거리 수정 등	18. 7. 2
	⑤	터널 내 노면수 유입방지 보완	18. 6. 1
	⑥	본선터널구간 측벽 배수 확인구 개선 (운영사 의견 반영)	18. 6.21
	⑦	단선 터널구간 도상 배수로 보수필요	18. 6.12
	⑧	레일식 차막이 자갈무덤 자갈보충 및 정리 필요	18. 6.12
	⑨	차량접촉 한계표 고정 및 도색 필요	18. 6. 7
	⑩	선로전환기 간류 하부 배수로 확보	18. 6.12
	⑪	선로 곡선부 도유기 설치 및 정상기능 확인 필요	18. 6. 8
	⑫	에스컬레이터 시공 완료 필요	18. 7.16
	⑬	엘리베이터 시공 완료 필요	18. 7.16
	⑭	통신설비 시공 및 연동 완료 필요	18. 6. 8

-13-

Ⅶ		종합시험운행 시행 결과

1. 시설물검증 시험결과

분야		시험항목	적 합	보 완	부적합	비 고
선로시설		4	4	-	-
전철전력설비		5	5	-	-
신호설비 및 열차제어설비		12	12	-	-
관제	TTC	66	66	-	-
	SCADA	10	10	-	-
계		97	97	0	0

1-1. 분야별 세부 시험결과

분야	코드	시험항목	시험기간	방법	시험결과
선로시설 (4항목)	TR_01	궤도성능시험, 궤도검측, 육안점검, 레일탐상	6.27 ~ 7. 3	용역	적합
전철전력 설비 (5항목)	PS_01	전차선 비디오 모니터링 시험	7. 5	자체	적합
	PS_02	전철변전소 특성시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
	PS_03	전철변전소 유도장애시험	7. 4	자체	적합
	PS_04	레일전위측정시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
	PS_05	연장급전시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합

-14-

분야	코드	시험항목	시험기간	방법	시험결과
신호설비 및 열차제어 설비 (12항목)	SI_01	정위치 정차(SSP) 검증(4량)	7. 9 ~ 7.13	자체	적합
	SI_02	PSD 시스템 시험(4량)	7. 9 ~ 7.10	자체	적합
	SI_03	STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(4량)	7.12	자체	적합
	SI_04	ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(4량)	7. 9	자체	적합
	SI_05	정위치 정차(SSP) 검증(6량)	7. 4 ~ 7.27	자체	적합
	SI_06	PSD 시스템 시험(6량)	7. 4 ~ 7.27	자체	적합
	SI_07	STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(6량)	6.27	자체	적합
	SI_08	ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(6량)	6.28	자체	적합
	SI_09	Global Test 시험(6량)	7. 5	자체	적합
	SI_10	출입문 개방 방향 확인(6량)	7. 3	자체	적합
	SI_11	역 무정차 통과(Skip Station) 확인(6량)	6.29	자체	적합
	SI_12	연속진로(Fleet, Cycle) 설정시험(6량)	7. 2	자체	적합
TTC (66항목)	TTC_01	TTC(Train Traffic Control) 관제설비 설치시험	7. 2	자체	적합
	TTC_02	관제실과 현장설비간 인터페이스	7.25	자체	적합
	TTC_03	시스템 기능(S/W) 시험	7.25	자체	적합
	TTC_04	시스템 제어시험	7. 4	자체	적합
	TTC_05	스케쥴 관련 이상 유무 확인	7.25	자체	적합
	TTC_06	열차운행 제어상태 확인	7.25	자체	적합
	TTC_07	관제설비간 인터페이스 시험	7. 6	자체	적합
	TTC_08	주전송설비	7. 2	자체	적합
	TTC_09	종합영상설비	7. 3	자체	적합
	TTC_10	관제전화설비	7. 4	자체	적합
	TTC_11	열차무선시스템	7.16 ~ 7.18	자체	적합
	TTC_12	통합교환설비	7. 5	자체	적합
	TTC_13	통합관리시스템	7. 6	자체	적합
	TTC_14	기타(소방,CCTV 등)시험	7. 10~ 7.16	자체	적합
SCADA (10항목)	SCA_01	SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 설비 기능시험	7.11 ~ 7.25	자체	적합

-15-

1-2. 분야별 장애사항 조치결과

분야	건 수		조치결과
	장애	개선
신호	1	-	완 료
전차선	-	-
송변전	-	-
차량	-	-
기계(PSD)	-	-
통신	-	-
SCADA	-	-
신호/운영	-	-
신호/PSD(고무발판)	1	-	완 료
신호/PSD(가동발판)	-	1	완 료
계	2	1

1-3. 분야별 세부 장애사항 조치결과

점검분야 (관리코드)	구간 위치	조치내용	발생 원인	조치 부서	조치 결과
신호 (SI_09)	931 정거장	1) 7. 4(수) 관제신호 시험중 931정거장 하선 진입중 차량 EB(비상제동) 발생 ↳ 7. 5. 930역 지상 ATC 업데이트 실시 7. 6. 야간 검증하여 비상제동 미발생	업데이트 미실시	현대 정보 기술	′18. 7. 6 완료
신호/PSD (SI_11)	935 정거장	1) 7. 4(수) 03:00경 관제신호 시험중 935정거장 상선 진입중 차량과 시설물 (고무발판 볼트) 접촉 ↳ 7.25(수) 차량 속도 45km/h 설정, 고무발판 및 고정볼트 조정	곡선속도 미반영	현대 정보 기술	′18. 7.25 완료

1-4. 분야별 세부 개선사항 조치결과

점검분야 (관리코드)	구간 위치	조치내용	발생 원인	조치 부서	조치 결과
신호/PSD (가동발판) (SI_06)	935 정거장	1) 7.25(수) 10:30경 PSD 개방상태에서 열차 후진 중 전동차와 가동발판 접촉 ↳ 가동발판 보수 및 개선사항 조치후 교육 실시	기관사와 감리단의신호오류	포스코 건 설	′18. 9.11 완료

-16-

2. 영업시운전 시험결과

분 야	시험항목	세부항목	적 합	보 완	비 고
운 전	4	11	11	-
영 업	7	21	21	-
계	11	32	32	0

2-1. 분야별 세부 시험결과

시험항목		세부시험항목 및 내용	시험횟수	결과
운전	운전시간 (OP_01)	□ 기지에서 출발역까지의 출고시간 검토(생략)	-	-
		□ 운전매뉴얼 철도차량운전자 출고 기능검사 및 시간 측정	3회	적합
		□ 정차역 정차시간 검토	4회	적합
		□ 역 구간별 운전시분(여객100% 승차 시)	4회	적합
		□ 종착역 도착 후 반복시간 산정	3회	적합
	열차운영 계획스케줄 (OP_02)	□ 연속열차 운행 시 최소운행시격	3회	적합
		□ 열차반복 사용 시 설정된 반복시간	3회	적합
		□ 역 도착선 도착 후 출발선 전선시간	3회	적합
		□ 기지에서 출발역까지의 출고소요시간(생략)	-	-
		□ 영업 종료 후 기지 입고 시 소요시간(생략)	-	-
	운전자 노선숙지 (OP_03)	□ 철도차량운전자 운행노선 인지를 위한 주․야간 숙지훈련	38회	적합
	이례사항 대처능력 및 운행안전 (OP_04)	□ 운행 중 비상제동 동작 및 대처방법(생략)	-	-
		□ 장애물 발생에 대한 처리요령(생략)	-	-
		□ 사상사고 발생 시 처리방법 및 보고체계(생략)	-	-
		□ 사고 시 단선 운전취급에 대한 대처능력(생략)	-	-
		□ 신호장애 발생 시 대응능력(생략)	-	-
		□ 탈선 운전사고 발생 시 열차소통 방안	1회	적합
		□ 열차화재 시 여객대피 방안	1회	적합
		□ 터널․교량 등에서 비상정차 시 처리방안(생략)	-	-
		□ 열차고장 시 구원열차 및 여객유도 방안(생략)	-	-
		□ 유관기관 출동시간 및 역할분담 등 협력체계 점검	1회	적합

-17-

시험항목		세부시험항목 및 내용	시험횟수	결과
영업	여객 접근로 및 동선 (CO_01)	□ 지하철, 버스, 주차장 접근로 점검	3회	적합
		□ 접근노선 장애요소 파악 및 보완	3회	적합
		□ 역사내 환승시설 설치 및 보완	3회	적합
		□ E/S, MW, 엘리베이터 점검 및 혼잡도	3회	적합
		□ 장애인 이동로 확보여부 점검	3회	적합
		□ Carter 이동 여부 점검	3회	적합
	여객 승하차 (CO_02)	□ 자동 개․집표기 작동상태 점검	3회	적합
		□ 게이트 통과후 정해진 좌석 이동시간 측정 (장애인 포함)	3회	적합
		□ 열차 정차표지 설치 확인 및 위치조정	3회	적합
	출발역 열차대기시간 (CO_03)	□ 차내 설비 점검시간	-	-
		□ 차내 비품 공급시간	-	-
		□ 여객 승차시간	-	-
	열차정보 (CO_04)	□ CTC와의 열차운행관련 정보 송․수신 점검	3회	적합
		□ 출․도착홈 안내게시기 표출	3회	적합
		□ 자동방송장치의 방송점검	3회	적합
		□ 객실 안내방송 및 표시기 표출	2회	적합
	역무점검 (CO_05)	□ 고객안전원 배치 및 교육	2회	적합
		□ 역무자동화시스템 운용 점검	3회	적합
	여객안전설비 (CO_06)	□ 계단, 에스컬레이터, 엘리베이터 전기설비 점검	3회	적합
		□ 승강장 안전상의 장애요인 점검 및 방화시설 점검	3회	적합
	안전 및 보안대책 (CO_07)	□ 영업운행안전관리 계획 점검	3회	적합
		□ 안전 및 보안 관련 소요설비 검토 및 확보	3회	적합
	기타 영업서비스 준비사항점검 (CO_08)	□ 역시설물 및 편의시설 점검
		-환기 냉‧난방 등 환경점검	4회	적합
		-대합실․승강장의자, 콘코스 휴게실, 화장실 점검	3회	적합
		-상업 및 공공시설 점검	3회	적합
		-역무시설 및 공간 점검	3회	적합
		-전화 등 편의설비 적정배치	3회	적합
		□ 열차내 비품공급체계 점검	3회	적합

-18-

2-2. 분야별 세부 시정·개선사항 조치결과

구분	분야	위치	조치내용	조치완료일
시정 명령	신호	-	신호시스템 안전보증문서 제출 ↳ 석촌고분역 지상 신호시스템(ATC) 소프트웨어 수정 사항을 반영한 제작사 안전보증문서를 2018.11.20.까지 제출 완료 예정임.	2018.11.20 까지 조치 예정
	건 축 (CO-06)	전공구	피난대피 통로 자동폐쇄장치 등 미 설치 ↳자동폐쇄장치 설치 완료, 자탐설비와 연동테스트 결과 제출 ↳승강장 축소구간에 대한 대피안내사인 설치 완료	2018.11.14
	소방전기 (CO-06)	933	환승역간 화재 수신기 미연동 ↳석촌역 9호선과 8호선의 화재수신기 연동 완료 및 시험결과표 제출	2018.11.15
	건 축 (CO-06)	933역 936역	특별피난계단 도장을 불연재료로 미 시공 ↳ 불연재료인 바닥 마감재 에폭시 도장을 제거중에 있으며, 2018.11.20.까지 조치 완료 예정임	2018.11.20 까지 조치 예정
개선 사항	관제(설비)(CO-06)	관제센터	역 공조/냉방설비 등을 관제와 미연동 ↳ 역 자동제어설비와 관제실간 연동 완료 및 시험결과표 제출	2018.11.15
	건 축 (CO-06)	전공구	대합실 종합안내 장치 소프트웨어 미설치 등 ↳ 종합안내장치 설치 및 전자지도 업데이트 완료하였으나, 일부 역사의 통신(인터넷) 연결이 미비하여 미표출된 상태임. 2018.11.20.까지 조치 완료 예정임.	2018.11.20 까지 조치 예정

2-3. 분야별 장애사항 조치결과

구분	계	전기	신호	통신	PSD	토목	차량	결 과
계	113	6	34	14	50	1	8	조치완료

Ⅷ		종 합 의 견

❍ 철도시설 기술기준 관련 시정·개선사항 18건, 시설물검증시험

개선사항 1건, 영업시운전 시정·개선사항 6건중 3건은 완료하였고,

영업시운전 시정명령 2건 및 개선사항 1건은 2018.11.20.까지 완료할

예정에 있으며,

또한, 종합시험운행 기간에 발생한 장애사항도 모두 조치 완료되어

2018.12.1.부터 정상 개통하는데 문제가 없음.

붙 임 1. 시설물검증시험 개선사항 조치결과 1부.

2. 영업시운전 시정·개선사항 조치결과(점검표 포함) 1부.  끝.

-19-