문서번호	시설보수과-8778
결재일자	2018.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		代김영원	11/23 신응수
협조

공사 준공기한 연기 검토 보고

(당현3교 외 1개소 내진보강공사)

2018. 11.

북부도로사업소

(시설보수과)

공사 준공기한 연기 검토 보고

(당현3교 외 1개소 내진보강공사)

『당현3교 외 1개소 내진보강공사』을 위탁 감독하고 있는 서울시설공단으로부터 준공기한 연기 검토 보고서가 제출되어 이에 대한 검토 보고 임

□ 관련근거

❍ 시설관리공단 공사감독2처–18332(2018.11.20.) : 준공기한 연기 검토 보고서 제출

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 당현3교 외 1개소 내진보강공사

❍ 공사기간 : 2018. 7. 30. ~ 2018. 11. 30.

❍ 도 급 액 : 871,985,600원

❍  공사개요  : 교량받침교체 84개, 댐퍼설치 8개, 아스팔트포장 8.42a,

표면보수 842㎡, 기타 부대공 1식

❍ 도 급 자 : 성원특수건설 대표 이영자

□ 공단 보고내용

❍ 본 공사에 대한 발주청 추가 작업지시에 따라 절대공기를 반영한 공사 준공     기한 연기 요청

- 준공기한 연기 일수 산출 : 총10일

ㆍ 도봉1교 추가 작업지시(표면보수 26㎡, 조류방지망 재설치 48㎡)에 따른     실작업 소요일수 : 2일

ㆍ 빨래골교 추가 작업지시(전단키설치 2개, 조류방지망 철거 및 재설치)에     따른 실작업 소요일수 : 8일

❍ 공사 준공기한 연기(총10일)

- 당  초 : 2018.7.30. ~ 2018.11.30.

- 변  경 : 2018.7.30. ~ 2018.12.10.

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과(※귀책사유-서울시)

□ 검토의견

❍ 서울시설공단의 공사 준공기한 연기 검토 보고서에 대하여 검토 결과 발주처     추가 작업지시에 따른 절대공기 부족을 반영한 것으로 준공기한 연기가 타당     하여 승인하고자 함

❍ 공사 준공기한 연기(총10일)

- 당  초 : 2018.7.30. ~ 2018.11.30.

- 변  경 : 2018.7.30. ~ 2018.12.10.

붙임: 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 서울시설공단 공문(준공기한 연기 검토 보고서) 1부.  끝.