투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2018년 중랑캠핑숲 노후시설 정비공사 건설폐기물 처리용역)

1. 시설과-5438(2018.11.26.)호와 관련입니다.

2. 『2018년 중랑캠핑숲 노후시설 정비공사』 건설폐기물 처리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 중랑캠핑숲 노후시설 정비공사 건설폐기물 처리용역

나. 공사기간 : 2018. 9. 28. ~ 2018. 12. 15.

***********************************

****************************

마. 변경내역 : 별첨

바. 변경금액

구 분		당 초	변 경	증⦁감	비 고
총 용 역 비		21,700,000	17,670,000	-4,030,000
도 급 비	공 급 가 액	19,727,273	16,063,636	-3,663,637
	부가가치세	1,972,727	1,606,364	-366,363
	합 계	21,700,000	17,670,000	-4,030,000

사. 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원

보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

붙임  1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 설계내역서 1부.  끝.

조경팀장	이무림		시설과장	11/28 김재균
협조자	재무팀장	代전정아
시행	시설과-5480	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5966	/전송	02-3783-5969	/		/	부분공개(5)