문서번호	교량안전과-22060
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		교량관리팀장		교량안전과장
송준섭		유제천		12/05 한유석
협 조
	주무관				김윤희
	주무관				백운경
	주무관				김인철

한강교량 일상유지보수공사 외 4건 건설폐기물처리용역 설계변경 시행계획 보고

2017. 12.

교량안전과

(교량관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한강교량 일상유지보수공사 외 4건 건설폐기물처리용역

설계변경 시행계획 보고

『2017년 한강교량 일상유지보수공사(1,2공구)』 및 『단일 보수공사(5건)』의 건설폐기물 처리용역 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 한강교량 일상유지보수공사 외 4건 건설폐기물처리용역

□ 용역기간 : 2017. 04. 19. ~ 2017. 12. 31.

□ 총용역비 : 201,916,000원

□ 대상공사

공 사 명	시공사	비고
2017 한강교량 일상유지보수공사 1공구	㈜풍산C&C	통합발주
2017 한강교량 일상유지보수공사 2공구	㈜선진기술공사
성수대교 보수공사	㈜에스지공영
한강대교 보수공사	이지건설㈜
탄천1교 보수공사	가사리방수㈜외1개사
한강상 PSC교량 안전강화(서강대교) 보수공사	고황건설㈜
한강교량 노후목재데크교체 보수공사	경인건설㈜	추후정산

□ 용역개요

- 건설폐기물 수집·운반 : 9,086톤

구분	폐콘크리트	폐아스콘
건설폐기물 수집 및 운반	678톤	8,408톤

- 건설폐기물 중간처리 : 9,086톤

구분	폐콘크리트	폐아스콘
		덩어리	평삭재	혼합폐기물
건설폐기물 중간처리	678톤	105톤	6,527톤	1,776톤

□ 용 역 사

- 수집·운반 : ㈜오성디엔이 대표 이두희

- 중간처리 : ㈜오성개발 대표 정유진

Ⅱ		설계변경 사유

□ 폐기물처리 물량 증·감 책임감리 실정보고

- 한강교량 일상유지보수공사 외 4건 건설폐기물처리용역 1회 설계변경

- 2017 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-1공구 설계변경(4회) 시행보고

- 2017 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구 설계변경(4회) 시행보고

- 성수대교 보수공사 설계변경(제1회) 검토 보고

- 한강대교 보수공사 설계변경(정산) 검토 보고

- 탄천1교 보수공사 실정보고(4회)에 대한 검토 보고

- 한강상 PSC교량 안전강화공사(서강대교) 설계변경 시행 보고

- 한강교량 노후목재데크교체 보수공사 설계변경(정산) 검토 보고

Ⅲ		설계변경 현황

□ 공사별 폐기물 처리 물량 증·감 내역

사 업 명	폐기물 처리현황(톤)
	폐콘크리트		폐아스콘 (덩어리)		폐아스콘 (평삭재/무대)		폐아스콘 (혼합폐기물)
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
합 계	678	685	105	105	6,527	5,693	1,776	2,612
일상유지보수공사 1공구	130	155	-	-	1,450	475	305	239
일상유지보수공사 2공구	140	40	-	-	1,390	61	305	34
성수대교 보수공사	-	-	-	-	400	511	69	128
한강대교 보수공사	50	219	-	-	280	48	24	309
탄천1교 보수공사	250	163	105	105	945	1,941	355	831
PSC교량 안전강화공사(서강)	-	-	-	-	2,062	2,657	638	991
노후목재데크교체 보수공사	108	108	-	-	-	-	80	80

□ 공사별 폐기물 처리비 증·감 내역

사 업 명	설계변경 내역(원)		증·감	비고
	당 초	변 경
합 계	201,916,000	242,691,000	(증)40,775,000	천원이하 단수조정
일상유지보수공사 1공구	35,507,000	23,397,000	(감)12,110,000	감 추산
일상유지보수공사 2공구	41,000,000	3,857,000	(감)37,143,000	감 추산
성수대교 보수공사	9,608,000	13,411,000	(증) 3,803,000	낙찰차액 사용
한강대교 보수공사	8,646,000	24,189,000	(증)15,543,000	낙찰차액 사용
탄천1교 보수공사	34,640,000	75,970,000	(증)41,330,000	낙찰차액 사용
PSC교량 안전강화공사(서강)	61,966,000	91,318,000	(증)29,352,000	낙찰차액 사용
노후목재데크교체 보수공사	10,549,000	10,549,000	-

Ⅳ		향후계획

□ 감리단 실정보고 내용을 검토한 바, 타당한 것으로 판단되어 상기와 같이 설계변경 및 변경계약을 재무과에 의뢰코자 함

□ 폐기물처리 증액 대상공사는 각 단일 보수공사 발주방침에 따라 낙찰차액 및 집행잔액을 활용하여 설계변경에 반영토록 함

(일상유지보수공사 1,2공구는 감 추산)

붙임  1. 감리단 검토서 및 내역서 1부.

2. 공사별 검토보고서 각 1부.  끝.