좋은빛위원회 심의결과 보완사항 조치계획

□ 심의건명 : 올림픽대교 경관조명 개선계획

보완사항	조 치 계 획
- 위원회 위원이 임회하여 현장 테스트를 실시하고,레이져 조명의 상향광 및 주변 빛공해 등을 검토해 주기 바람.	- 2018년 12월 5일 좋은빛위원회 위원이 입회하여 레이져조명 샘플테스트 시행함.(유선으로 일정협의 완료) ※ 붙임 세부 현장샘플테스트 계획서 참조
- 주탑부(고보조명)의 컬러 연출 방법에 대해 재검토 바람.	- 주탑부 상부 조형물 대한 고보조명 연출 방법은 위원회 위원의 요청사항(상무 조형물외 연출 효과를 심의 할 수 있는 주탑부 내부면)에 맞춰 샘플 테스트 시행함.

올림픽대교 조명 설계 샘플테스트 계획서

○ 일 시 : 2018.12.5. (18:30~19:30)

○ 장 소 : 올림픽대교 교량 상류측 주탑

○ 내 용

- 주탑부, 고보조명 컬러연출 시연

- 사장교 케이블 레이져 조명 빛공해 여부등 측정

○ 참석대상 : 좋은빛 심의위원, 서울시 및 ㈜누리플랜 조명관계자 등

○ 세부 테스트 일정

NO	시 간	인원	작업내용	소요시간	비 고
1	15:30	8명	․현장확인 및 조명기구 현장 내 반입	30분
2	16:00	8명	․조명기구 임시설치 및 테스트 준비	90분
3	17:30	8명	․전원투입작업	30분
4	18:00	8명	․시운전 및 사진촬영, 동영상 촬영 준비	30분
5	18:30	8명	․좋은빛 심의위원 입회하에 샘플테스트 진행	60분
6	19:30	8명	․조명기구 철거 및 마무리 작업	30분

○ 위 치 도

테스트 장소

·교량 상류 주탑에서 남단방향 20m지점