투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰[시민생활사박물관 리모델링(증축)통신공사-총차1회, 제1차1회]

우리 본부에서 시행 중인「시민생활사박물관 리모델링(증축) 통신공사와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시민생활사박물관 리모델링(증축) 통신공사(총차1회,제1차1회)

나. 계 약 자 : 테크로빌리지㈜

다. 계약변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	441,116,102	443,234,000	증 2,117,898
1 차	170,000,000	170,000,000	직·간접비 조정
공사기간	변 경 없 음

라. 예산과목 : 복지본부어리신복지과, 어르신복지수준향상 및 장사시설운영내실화, 치매어르신 지원강화, 어르신복지시설설치지원, 시설비

마. 변경사유 : 현장여건 변경에 따른 실정보고 및 선행(건축분야)공종에 맞춰 내역물량 변경

붙임   1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차 및 1차)

3. 합의서 및 제비율 표  각 1부.

4. 건설사업단 공문 사본 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	백남진		건축설비과장	김은덕		설비부장	전결 11/30 권오식
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-16502	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)