		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	가락시장 건어제2경매장 철거공사 가연성폐기물 처리용역 계약기간 연장 시행

1. 관련문서

가. 건설공사팀-120(2018. 1. 25.), ‘가락시장 청과직판(가,나동) 및 건어제2경매장 철거공사 시행’

나. 건설공사팀-238(2018. 2. 28.), ‘가락시장 건어제2경매장 철거공사 가연성폐기물 처리용역 시행’

다. 건설공사팀-997(2018. 9. 4.), ‘가락시장 청과직판(가,나동) 및 건어제2경매장 철거공사 계약기간 연장 시행’

2. 건어제2경매장 철거공사 추진 일정에 따라 건어제2경매장 철거공사 가연성폐기물 처리용역의 계약기간을 아래와 같이 연장 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 가락시장 건어제2경매장 철거공사 가연성폐기물 처리용역

나. 계약금액 : 금 3,410,000원 (금 삼백사십일만원정)

다. 계약기간 : ʹ18. 3. 6. ~ ʹ18.11.30. (270일간)

라. 계약업체 : 대청환경상사 (대표 김관희), 주식회사 금강이엔텍 (대표 정병인)

마. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	‘18. 3. 6. ~ ‘18.11.30.	‘18. 3. 6. ~ ‘18.12.31.	증 31일
용역금액	3,410,000 원	3,410,000 원	변경 없음

바. 변경사유 : 건어제2경매장 철거공사 추진 일정에 따라 계약기간 연장이 불가피함.

붙임  1. 기간연장 합의서 1부.

2. 관련문서        1부.  끝.

★담당자						팀장				건설안전본부장		11/07
		김찬수						강성규			김승호
협조자

시행			건설공사팀-1212				(2018.11.07)			접수				()
우	05699			서울시 송파구 양재대로 932								/
전화		(02)3435-0569			전송	(02)3435-0557		/	kcs3717@garak.co.kr					/	공개