문서번호	급수운영과-30542
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이상욱	김남구	12/10 代김남구
협 조

공사근로자 노무비 청구 적정성 검토보고

(2018년 목1동외 17개동 상수도공사, 11월분)

2018. 12.

강서수도사업소

급수운영과

공사근로자 노무비 청구 적정성 검토보고

(2018년 목1동외 17개동 상수도공사, 11월분)

우리사업소에서 시행중인 「2018년 목1동외 17개동 상수도공사」의 계약상대자 *************에서 제출한 공사근로자 노무비 청구서에 대한 적정성 검토 보고임

□ 관련근거

○ 하도급 대금지급 확인시스템 : 사장방침 제93호, 2012. 4. 1.

○ 계약예규 : 9. 공사계약 일반조건

- 제43조의 2(하도급대금 등 지급확인)

- 제43조의 3(노무비의 구분관리 및 지급확인)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 목1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가)

○ 공사기간 : 2018. 6. 12. ~ 2019. 6. 30.

○ 공사개요 : D=15~300 mm, L=1,584 m

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : ************

□ 공사근로자 노무비 청구현황

○ 노무비 청구내역 (2018. 11월분)

노무비 청구일	노무비 총액 (직접노무비+부가세)	노무비 청구 (원)
		전월까지 지급금액	금회 청구금액	총 청구금액	잔여금액
***********	***********	89,236,249	25,465,000 ***********	114,701,249 (40.3%)	169,652,471

□ 노무비 적정성 검토결과

○ 공사 진행 공정률 : 43% (작업지시대장, 11월 30일 기준)

- 공정률 : 작업지시완료 개략공사비/도급액

= ***********************

○ 노무비 적정성 검토결과 : 적정함

검토항목	검토기준	검토내용		검토결과
노무비 청구금액 적정성	노무비 청구요청 금액과 실근로자 지급금액 일치여부 확인	금회 노무비 청구요청금액	***********	적정
		금회 실근로자 지급금액+부가가치세	******************** ************
		※ 관련자료: 근로자 지급명세서
	실공정률보다 노무비 청구율이 적은지 확인	노무비 청구율(누계)	*****	적정
		실 공정률	***
		비교 공정률(%)>청구율(%)	*********

□ 행정사항

○ 대금지급 확인시스템 승인처리

- 공사근로자 노무비 청구 적정성 검토결과 적정하여 승인처리

○ 공사근로자 노무비 지출 시행

- 지출금액 : 금25,465,000원

- 지출내역 : 11월 노무비 (붙임참고)

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 공사근로자 노무비 청구서 1부.  끝.