문서번호	안전치수과-20770		주무관			하수계획팀장			안전치수과장	안전건설교통국장
결재일자	2018.12.12.
			정지원			김정선			황왕연	12/12 남궁용
공개여부	부분공개(5)
방침번호
			협조
방침번호

2018년 하수관거공사 공공측량 GIS DB 및 정밀점검자료 DB 구축용역

설계변경(정산) 검토 보고

2018. 12.

안전건설교통국

[안전치수과]

2018년 하수관거공사 공공측량 GIS DB 및 정밀점검자료 DB 구축용역

설계변경(정산) 검토 보고

관내 하수관거공사 공공측량 GIS DB 및 정밀점검자료 DB 구축용역 중 설계변경(정산) 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고합니다

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 2018년 하수관거공사 공공측량 GIS DB 및 정밀점검자료 DB 구축용역

용역기간 : 2018. 7. 27. ~ 2018. 12. 31.

도 급 비 : 36,484천원

도 급 자 : 대한항업(주) 대표 이천용

Ⅱ		설계변경 검토내용

현장여건 변동 및 추가 공사시행으로 물량증가 발생

물량 변경 내역

구 분	기준점(개소)			연장(km)			비고
	당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
‘18 하수관거공사 공공측량 GIS DB 및 정밀점검자료 DB 구축 용역	25	38	증)13	3.00	4.70	증)1.70	공공측량 DB
				2.80	2.80	-	정밀점검 DB

설계 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감
총용역비	39,008,040	56,335,300	증	17,327,260
도 급 비	36,484,000	53,240,000	증	16,756,000
성과심사비	2,524,040	3,095,300	증	571,260

Ⅲ		조치계획

상기와 같이 설계변경 시행 후 준공 처리코자 함.

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 실정보고 1부.

3. 세부물량 내역  1부.  끝.