＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차, 최종) 시행(2018년 중랑,동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사)

우리 사업소에서 시행중인「2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경(2차, 최종)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사
(장기계속단가계약)

2. 계 약 자:*************

3. 설계변경 사유: 시공물량 증·감 및 신규공종 발생

4. 공사기간변경: 기존 2018. 4. 9.~ 2019. 4.30.

변경 2018. 4. 9.~ 2018. 12. 14.

5. 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	***********	************	***********	물량증감 및 신규공종 발생
도 급 비	***********	***********	***********
관급자재비	***********	***********	*

6. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(가압장 배수지 등 시설물 유지관리)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 밸브 정비)

- 소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설 설치·보수

붙임: 설계변경 내역서 및 관련 문서 각 1부.  끝.

주무관	박윤선		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	천성훈		동부수도사업소장	12/13 이구석
협조자
시행	시설관리과-34379	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/		/	부분공개(5)