문서번호	건설계획팀-240			★담당자	팀장		단장			유통본부장
보존기간	년										03/23
결재일자	2018.03.23
공개여부	공개
				협 조
				감 사	감사실				감사필
가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역 계약 기간 연장

2018. 3.

	서울특별시농수산식품공사
건설계획팀

현대화사업 홍보관 설치 용역 계약 기간 연장

가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역을 수행함에 있어 과업 추가 및 결과물의 완성도를 높이기 위하여 용역 수행업체와 합의하여 용역 기간을 연장하고자 함

Ⅰ		사업 개요

○ 사 업 명 : 가락시장 현대화사업 홍보관 설치 용역

○ 규    모 : 187㎡(1층), 전시패널, 채소 2동 모형 등

○ 계약금액 : 130백만원

○ 계약기간 : ’17.12.27 ⁓ ’18.3.26(총 90일)

○ 계 약 자 : ㈜000디자인 대표 000

○ 주요 과업

□ 가락시장 현대화사업 전시물(전시영상, 패널 등) 기획 및 설치

□ 현대화사업 채소 2동 모형 제작․설치

Ⅱ		관련 근거

○ 행정자치부 예규 제16호(지방자치단체입찰및계약집행기준, 제14장. 용역계약 일반조건, 제7절의 2. 계약기간의 연장)

○ 가락시장 현대화사업 홍보관 설치용역 추진 계획(건설계획팀-894)

○ 가락시장 현대화사업 홍보관 계약체결내역 통보(재무팀-5740)

Ⅲ		용역 기간 연장

○ 계약변경 사항

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘17.12.27~’18.3.26	‘17.12.27~’18.5.15	연장) 50일

○ 용역 금액 : 변경 없음

○ 용역 기간 연장 사유

- 가락시장 현대화사업 2공구(채소2동) 사업이 ’18.3월 현재 조달청 설계 적정성 심사 중에 있어 일부 변경 사항이 예상됨에 따라 이에 대한 홍보관 추가 반영이 필요하며,

- 가락시장 및 현대화사업에 대한 면밀한 분석을 통해 보다 효율적인 홍보 전달 방법에 대한 필요성이 발생함에 따라 관련 용역에 소요되는 일정이 당초 계획보다 초과되어 원활한 수행 및 완성도를 높이기 위해 용역 기간 연장

따로붙임 : 합의서 1부.  끝.