	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 토목시설물 유지보수공사 설계변경 시행(1차)

1. 2014년 토목시설물유지보수공사에 대하여 붙임 설계서에 의거 아래와 같이 설계변경 코자 합니다.

가. 공사명 : 2014년 토목시설물 유지보수공사

나. 공사기간 : 2014. 2. 24 ～ 2014. 12. 31

다. 도급자 : 한미래산업(주) 대표 남명선

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	293,587,000원	340,000,000원	증 46,413,000원
도급비	293,587,000원	340,000,000원	증 46,413,000원
관급비	0 원	0 원	0원

마. 설계변경사유 : 당초설계시 예정물량으로 설계되어 실제시공에 따른 물량변경에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 공원이용시민만족도향상,공원관리시민참여확대와이용활성화, 고객만족도향상, 공원시설물유지보수및정비, 시설비

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계도서 1부.

3. 보고서 1부 끝.

주무관	서동민		시설과장	공헌구		관리부장	정상택		서울대공원장	05/28 안영노
협조자	주무관	김희준		주무관	이상국		총무과장	이경로
시행	시설과-3060	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로102(막계동) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7412	/전송	507-7230	/	baekgu2@seoul.go.kr	/	대시민공개