투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『제3처리장 소화조C계열 보수공사』 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

1. 시설보수과-7239(2018.12.18.)호에 따라 우리 센터에서 시행 중인 『제3처리장 소화조C계열 보수공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경 및 변경계약을 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 제3처리장 소화조 C계열 보수공사-중랑

나. 도 급 자 : 리뉴엔지니어링주식회사   대표 천 수 현

다. 공사기간 : 2018. 9. 13. ~ 2018. 12. 31.

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		431,026,000	471,460,000	증) 40,434,000
도급비	공급 가액	391,841,819	428,600,000	증) 36,758,181
	부가가치세	39,184,181	42,860,000	증) 3,675,819
	계	431,026,000	471,460,000	증) 40,434,000

마. 설계변경 사유 : 공사완료에 따른 시공물량 증ㆍ감 발생

바. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

따로붙임 :  1. 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 당초, 변경 수량산출서 1부.

5. 합의서 1부.  끝. (품위번호: )

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김원선		주무관	조연상		시설보수과장	윤승범		중랑물재생센터소장	12/18 이성재
협조자
시행	시설보수과-7253	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	부분공개(7)