문서번호	도로계획과-16031
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
전문관	민자사업팀장	도로계획과장		안전총괄관
김상익	조용상	代조용상		12/18 하종현
협 조

계약변경 검토 보고

(국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계-잔여구간) 기본 및 실시설계 용역)

2018. 12.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

계약변경 검토 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계-잔여구간) 기본 및 실시설계용역

○ 규    모

- 지하차도 신설 : 폭 왕복 4차로, 연장 445m(Box-Type)

- 상부 공원조성 : 면적 15,600㎡

○ 기    간 : 2016.07.28 ~ 2018.12.31

○ 계약금액 : 금858,504,000원 (금팔억오천팔백오십만사천원)

○ 계 약 자 : ㈜유신 외 1개사

□ 계약 변경사항

○ 공원조성 분야 통합 시행으로 계획이 변경됨에 따른 관련 항목 실시설계 타절(도로계획과-11534호, 2017.08.09)로 인한 과업규모 변경과 자문회의 실제 지급비용 정산

○ 계약 변경 사항

구 분	당 초	변 경
과업규모	지하차도 신설 폭 왕복 4차로, 연장 445m(Box-Type) 상부 공원조성 면적 15,600㎡	지하차도 신설 폭 왕복 4차로, 연장 445m(Box-Type) 상부 공원조성 면적 15,600㎡(기본설계)
계약금액	858,504,000원	791,640,000원 (감 66,864,000원)

○ 항목별 계약 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계	858,504,000	791,640,000	-66,864,000	백원이하 절삭
기본 및 실시설계비	613,474,000	613,474,000	-
조경설계비	100,020,000	40,008,000	-60,012,000
측량비	16,760,000	16,760,000	-
지반조사비	28,450,000	28,450,000	-
디자인심의 작성비	13,000,000	13,000,000	-
손해배상공제료	7,390,545	7,390,545	-
부가가치세	77,909,455	71,908,255	-6,001,200
설계자문비	1,500,000	650,000	-850,000

□ 향후계획

○ 2018.12. : 용역준공 예정

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.
2. 관련 방침서 1부
3. 자문회의비 정산내역 1부.  끝.