문서번호	공공재생과-12496
결재일자	2018.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	서울역재생사업팀장	공공재생과장
조선휘	박일형	12/26 홍선기

준공기한 연장 검토보고(예장동7-24번지외2필지 앵커시설 문화재조사용역)

예장동7-24번지외2필지 앵커시설 문화재조사용역 -

준공기한 연장 검토보고

2018. 12.

도시재생본부

[공공재생과]

-예장동7-24번지외2필지 앵커시설 문화재조사용역-

준공기한 연장 검토보고

「예장동 7-24번지 외 2필지 앵커시설 문화재 조사 용역」 과업수행과 관련하여 과업 기간내 문화재 조사 이행 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 예장동7-24번지외 2필지 앵커시설 문화재조사

○ 용역기간 : 2018. 11. 16. ~ 2019. 1. 4.

○ 계약금액 : 금7,410천원

○ 용 역 사 : 재단법인 한강문화재연구원

□ 추진경위

○ '18.11. 5. 예장동7-24외2 앵커시설 사업추진방안 보고

○ '18.11. 9. 문화재 발굴(시굴)조사 추진계획

□ 보고 내용

○ 변경내용 : 준공기한 연기

구분	기정	변경	비고
계약금액	7,410,000원	7,410,000원	변경없음
과업기간	2018. 11. 16. ~ 2019. 1. 4.	2018. 11. 16. ~2019. 3. 29.	증84일

○ 변경사유 : 절대공기부족

*********************

**************

********************************************************************************

*********************

붙임   준공기한 연기 요청 공문 1부. 끝.