문서번호	도시철도설비부-12143
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		차량과장	도시철도설비부장
장재순		강치석	12/27 구자훈
협조
	경리과장		이현숙

도시철도 9호선 전동차 56칸(32+24) 구매 관련

계약기간 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

도시철도 9호선 전동차 56칸(32+24) 구매 관련

계약기간 연장 검토 보고

『도시철도 9호선 혼잡도 개선 및 증차 계획』에 따라 계약 체결되어 시행중인 9호선 전동차 구매의 계약기간 연장 검토 결과를 보고 드림.

	구매개요
○ 구매수량: 전동차 56칸(32+24) 구매 ○ 계약기간: 32칸(’16. 12. 12.~’18. 12. 31.), 24칸(’17. 11. 29.~’18. 12. 31.) ○ 계약금액: 32칸(36,715,200천원), 24칸(27,138,936천원) ○ 계약업체: 현대로템(주)

Ⅰ		관련 근거

○ 물품구매계약일반조건 제24조(지체상금) 및 제25조(계약기간의 연장)

Ⅱ		연기 사유

○ 현대로템(주) 국내PM 18-343(’18. 12. 26.)호와 관련

- 증량편성 차량에 대한 형식승인검사 중단: ’17. 5. 15.~12. 1.(195일)

- 증량작업용 4칸열차 미제공에 따른 증량작업 중단: ’18. 7. 27.~9. 15.(50일)

- 24칸 구매 입찰마감일 연기(2차)에 따른 납기 부족: ’17. 8. 1.~9. 26.(56일)

Ⅲ		보고자 의견

○ 검사기관(한국철도기술연구원)과 증량차량에 대한 충돌기술기준 적용 이견으로     중단된 형식승인 검사기간 및 종합시험운행과 선행 구매차량의 본선시운전       실시로 4칸 열차가 미제공되어 중단된 증량작업기간은 물품구매계약일반조건     제24조(지체상금) 제3항, 제4항에 따라 지체일수에 산입하지 아니하고,

○ 선행 구매차량의 시운전이 완료되어야만 증량용 4칸 열차의 제공이 가능하므로     전동차 32칸 구매의 납품기한을 ’19. 5. 31.까지, 24칸은 ’19. 10. 31.까지      연장하고자 함.

Ⅳ		계약변경 내용

○ 계약기간 변경 내역

구 분	납품기한
	당초	변경후
전동차 32량 구매	’18. 12. 31.	’19. 05. 31.	5개월 연장
전동차 24량 구매	’18. 12. 31.	’19. 10. 31.	10개월 연장

○ 계약금액 : 변경 없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅴ		향후 계획

○ ’18. 12. 26.: 변경계약 의뢰

○ ’19. 06. 30.: 32칸 납품(예비주행) 및 운행투입 완료

○ ’19. 11. 30.: 24칸 납품(예비주행) 및 운행투입 완료.  끝.