문서번호	공원조성과-12960
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주제공원팀장	공원조성과장		푸른도시국장
곽문수	권종화	최현실		10/26 최윤종
협 조	동부공원녹지사업소장		이용태
	시설과장		진병규

『시민의 숲 재조성사업』관련

노후시설물 정비 추진계획

2017. 10.

푸른도시국

(공원조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『시민의 숲 재조성사업』관련

노후시설물 정비사업 추진계획

『시민의 숲 재조성사업』관련 투자심사 결과에 따라 관리사무실, 화장실 등 시설노후화로 개선이 시급한 시설에 대한 우선 정비로 시민들의 공원이용 활성화를 도모코자 함.

□ 추진근거

❍ 2017년 제4차(9월) 투자심사 결과 통보[재정관리담당관–12438호(2017.10.16.)]

- 결과 : 적정(계획대로 사업추진)

□ 추진경위

❍ ‘15.11.02. : 기본계획 및 기본설계 용역 착공

❍ ‘16.11.15. : 도시공원위원회 심의 (결과 : 조건부 가결)

❍ ‘16.11.21. : 타당성조사 제외 가능 여부 질의 (서울시 → 행자부)

❍ ‘16.12.07. : 타당성조사 관련 질의 회신 (행자부 → 서울시)

- 기존 시설의 효용증진을 위한 개량 및 유지보수사업은 타당성 조사 제외 가능

❍ ‘16.12.22. : 건설기술심의 (결과 : 조건부 채택)

❍ ‘16.12.30. : 용역준공

❍ ‘17.01.09. : 제1차 투자심사 의뢰

❍ ‘17.03.20. : 제1차 투자심사 결과 통보 (결과 : 재검토)

❍ ‘17.07.24. : 제4차 투자심사 의뢰 (1차 투자심사 결과 반영)

- 서울시 공원울폐도 조정은 별도계획 수립 후 추진(서울연구원 자문)

- 화장실, 관리사무실 등 정비가 시급한 시설 우선 정비

❍ ‘17.10.16. : 제4차 투자심사 결과 통보 (결과 : 적정)

□ 세부추진계획

❍ 위    치 : 서초구 양재동 236 일대

❍ 규    모 : 관리사무소 및 화장실 철거 후 신축(관리사무소 1, 화장실 4),

주변시설물 정비 등

❍ 사 업 비 : 3,067백만원 (‘17. 145, ‘18. 2,922)

❍ 사업기간 : 2017.11. ~ 2018.12.

❍ 추진방법

- 건설기술심의(2016.12) 결과 반영, 동부공원녹지사업소 시행

- 실시설계 : ’17. 시민의숲 재조성 예산(시설비 : 타당성조사비) 활용

- 시설공사 : ’18. 예산반영 시행

□ 향후계획

❍ 2017.10.       : 사업계획 알림 (공원조성과 → 동부공원녹지사업소)

❍ 2017.11.       : 기술용역타당성심의 및 실시설계 용역 발주

❍ 2017.11.~12. : 실시설계용역 시행

❍ 2018.01.~12. : 공사시행

첨부 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 건설기술심의 결과 공문 1부. 끝.