문서번호	공원녹지과-437
결재일자	2019.1.8.
공개여부	대시민공개

주무관	공원관리담당		공원녹지과장		도시환경국장
서은진	김용은		이상용		01/08 이계섭
협 조

아동 놀권리보장 놀이공간 조성사업 추진계획

- 맑은숲 어린이공원(장위동 317-1)-

도시환경국

공원녹지과

2019년 아동 놀권리보장 놀이공간 조성사업 추진계획

공원환경이 전반적으로 노후하고 개성이 부족한 어린이놀이터를 지역의 아동 및 주민 참여와 아동·놀이 전문가의 자문을 통해, 보다 흥미롭고 아동친화적인 놀이·휴식공간으로 탈바꿈 및 공원의 커뮤니티 기능을 강화하여 ‘아동 놀권리’ 확산에 기여하고자 함

Ⅰ		사업 계획

사업개요

□ 사 업 명 : 2019년 아동 놀권리보장 놀이공간 조성사업

□ 대 상 지 : 맑은숲 어린이공원(장위동 317-1)

□ 면    적 : 1,601㎡

□ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 11.

□ 사업내용 : 노후 공원 환경 재정비 및 아동 친화적 놀이·휴식 공간 조성

□ 사 업 비 : 320백만원(설계비 15백만원, 공사비 305백만원)

□ 예산과목 : 공원녹지과, 환경을생각하는푸른성북구현, 아동놀권리보장놀이공간 조성사업, 시설비및부대비, 시설비

사업목표

□ 노후하고 천편일률적 디자인의 놀이시설로 개성이 부족한 어린이공원을 보다 흥미롭고 아동친화적인 공원으로 개선

→ 공원 내 공간구성 및 동선 재설계, 놀이공간 확충

□ ‘문제공유-의견수렴-설계-시공-유지관리’ 전 과정에 지역 아동 및 주민 참여

→ 어린이 참여단 워크숍, 아동·주민설명회, 아동·주민 공사감독관제, 공원돌보미 등 운영

□ 모든 아이가 차별 받지 않고 여러 세대가 함께 어울릴 수 있는 공원 조성

→ 다양한 성별·연령별 이용자의 이용행태 반영

Ⅱ		추진 계획

추진일정

1월		2월			3월		4월	5월	6월		7월	8월	9월	10월	11월
◀----기본 및 실시설계 용역(60일)----▶								입찰 (30일)	◀---------------공사 및 안전검사(150일)------------▶
설계용역발주	어린이 워크숍		기본 설계 초안	전문가 자문	기본 설계 보완	주민설명회	실시설계 (30일)		주민 공사 감독 관	공사시행 (120일)				확인검사 설치검사 (30일)	공원돌보미 모집 및 운영

아동·주민 참여 계획

1. 설계 단계

□ 어린이 참여단 워크숍

- 참 여 자 : 대상지 인근 안암초등학교 어린이(학교추천)

- 기    간 : 2019. 1. ~ 2.

- 내    용 : 기존 공원에 대한 문제 및 개선점 공유, 놀이 공간 선호도 조사 등

- 방    법 : 자유 토론, 글짓기, 설문 등

- 결과반영 : 계획의 기본 방향 및 설계 개념 설정

□ 놀이·아동 전문가 자문

- 참 여 자 : 아동·놀이 분야별 전문가 2-3인(교육아동청소년담당관 추천)

- 기    간 : 2019. 2.

- 내    용 : 계획안 검토 및 자문

- 결과반영 : 기본 계획안 보완 및 발전

□ 아동·주민설명회

- 참 여 자 : 지역 아동·주민(학부모)

- 기    간 : 2019. 3.

- 내    용 : 계획안 설명 및 의견청취

- 결과반영 : 계획안 보완 및 실시설계 반영

2. 공사 단계

□ 아동·주민 공사감독관제

- 참 여 자 : 지역 아동·청소년 및 주민(학부모)

- 기    간 : 2019. 6. ~ 10.

- 목    적 : 투명하고 안전한 공사 진행

- 내    용 : 이용자 관점에서 현장 미비점 점검, 주민 민원 전달

- 결과반영 : 현장 조치

3. 운영 단계

□ 공원돌보미(환경정화, 재능기부)

- 참 여 자 : 성북구민

- 기    간 : 공원 개방 이후

- 내    용 : 환경정화(청소, 파손신고 등), 재능기부(놀이프로그램 등)

- 결과반영 : 봉사활동 실적인정, 청소용품 및 행사물품 지원 등

Ⅲ		향후 계획

□ 2019. 1.            설계용역발주 및 어린이워크숍

□ 2019. 2. ~ 4.       전문가자문, 주민설명회, 실시설계용역준공

□ 2019. 5.            공사 공개경쟁 입찰

□ 2019. 6. ~ 10.      공사시행 및 안전검사

□ 2019. 11.           공원돌보미 모집 및 운영

붙  임   1. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.