문서번호	자연생태과-650
결재일자	2019.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장		푸른도시국장
협 조

2019년 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

2019. 1

푸른도시국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	관련자치구
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019. 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

도심 하천의 나지화된 공간 등에 기존 식생과 연계한 군락형 숲 조성과 사면녹화 등으로 하천의 자연성 회복 및 경관개선에 기여코자 함.

Ⅰ		추진방향

귀화·외래 식물을 제거하고 자생식물 식재 등으로 하천 식생 회복

하천 제방, 둔치, 산책로 등 구간 구역별 특화

- 치수 안정성을 고려하여 수변부는 초본식재, 넓은 둔치는 숲으로 조성

- 제방사면에는 하단부는 관목, 상단부는 교목 중심 배식

- 하천변 산책로, 자전거길 주변에는 그늘 나무 식재로 하천이용 쾌적성 제고

수종은 고유종을 우선하되, 여건에 따라 미세먼지저감 등 환경정화

기능이 높은 수종 도입

Ⅱ		사업개요

위    치 : 중랑천 등 6개 하천 18개소

사업규모 : 225,740㎡

사업내용 : 식생기반 조성 및 제방사면 녹화 등

사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 10.

사 업 비 : 10,052백만원

연도별 추진 현황

구 분	계	2006~2015	2016	2017	2018
하천생태 복원사업	총 142개소 2,165,608㎡	96개소 1,580,578㎡	14개소 229,340㎡	15개소 227,040㎡	17개소 128,650㎡
예산액(백만원)	68,628	48,313	5,015	8,300	7,000

Ⅲ		세부 추진계획

사업 대상지

자치구별	사 업 개 요	규모 (㎡)	사 업 비 (단위:백만원)	비고
계	6개 하천(18개소)	225,740	10,052
성동구	･ 위치:중랑천(송정제방) ･ 내용:수목식재,전정 등	2,000	110
동대문구	･ 위치:중랑천(경재교~성북경계) ･ 내용:사면·둔치 녹화 등	8,500	500
중랑구	･ 위치:중랑천 ･ 내용:장미거리 연장	5,200	575
도봉구	･ 위치:중랑천(도봉구청~창동중학교) ･ 내용:사면·둔치 녹화 등	4,000	300
노원구	･ 위치:중랑천(창동교~월릉교) ･ 내용:그라스가든 조성	25,000	1,000
서대문구	･ 위치:홍제천(홍지문~사천교) ･ 내용:수목 및 초화류 식재	6,000	200
양천구	･ 위치:안양천(오금교~교척교) ･ 내용:식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	6,800	614
	･ 위치:안양천 ･ 내용:사계절 테마공원 조성	18,200	500
구로구	･ 위치:안양천(고척교~신정교) ･ 내용:식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	10,000	1,000
	･ 위치:안양천 생태 초화원 ･ 내용:수목, 초화류 식재	40,840	1,000
	･ 위치:안양천 ･ 내용:그늘목 식재 등	7,800	200
금천구	･ 위치:안양천(시흥대교~금천교) ･ 내용:식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	6,000	650
	･ 위치:안양천 ･ 내용:금천한천내 장미원정비	1,400	276.6
영등포구	･ 위치:안양천(양화교~한강합수부),도림천 ･ 내용:식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	4,000	500
	･ 위치:안양천 ･ 내용:시민이용 잔디광장 조성	10,000	416
서초구	･ 위치:양재천 ･ 내용:둔치 녹화 및 수목식재 등	3,000	400
송파구	･ 위치:장지천 ･ 내용:수변 경관개선 및 수목식재 등	60,000	1,000
강동구	･ 위치:고덕천 (상일가교~고덕교) ･ 내용:사면내 숲조성	7,000	800
자연생태과	･ 시설부대비		10

추진일정 및 방법

사업추진 계획 수립․통보(시 ⇨ 자치구)            : ’19. 1.

※ 사업추진시 2∼3월, 6∼7월 사업대상지 현황사진 촬영 실시

용역 타당성심사(자치구⇨기술심사담당관)           : ’19. 1. ~ 2.

설계 용역 시행(자치구)                              : ’19. 2. ~ 3.

- 유수 소통, 치수 등에 방해가 되지 않도록 하천법 제25조『하천 기본계획』을 준수하여 사업을 추진하고, 필요시 공사 착공전 하천관리위원회(시) 심의, 하천점용 협의 등의 제반 절차 이행

설계 심의(자치구⇨시)                             : ’19. 2. ~ 3.

- 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행 시 요청

계약 심사(자치구⇨계약심사과)	: ’19. 3.~4.

- 계약심사 : 공사금액 3억(조경) 이상인 경우에는 시 계약심사과,

공사금액 3억(조경) 미만은 기관 자체 일상감사 실시

공사 시행(자치구)	: ’19. 4. ~ 10.

※ 6월 우기 전 사업 90% 이상 추진

공사 착․준공보고 : 발주는 5월초 이전, 준공은 최소 10월말 완료

- 사업완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공내역서,

공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

사업 추진시 유의사항

사업 대상 하천 고유의 자생 생물종 복원 중심으로 하천사업 추진

하천이나 제방의 본래 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 녹화사업 추진

설계과정에 주민, 유관기관, 해당지역 시․구의원의 의견을 수렴하여 민원발생 등으로 인해 사업이 지연되는 사례 방지 등

설계변경 등 주요사항은 시(자연생태과)․자치구 사전 협의 시행

하천의 경관적 통일성 및 연속성을 고려하여 시설물의 디자인 및 색채 등은      『공원시설 색채디자인 가이드라인』준수

- 시설물의 재료는 자연친화적(목재, 흙, 자연석재) 소재 사용

- 번쩍거리는 광택 스테인레스나 철재 재료 사용 자제

- 시설물의 색채 선정시 자연과의 조화성을 고려하고 색상의 통일성 유지

- 현란한 원색 사용은 금하고 자연경관의 배경색채로 선택

하천변 수목 식재시 전도 예방 조치(와이어 지주대 설치 등 주변 여건 고려)

기타 하천생태복원 사업 추진에 따른 세부사항 등은 아래의 규정 등을 참조하여 시행

-『하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(국토교통부 2007.5.29)』

-『생태하천복원사업 업무처리 지침(환경부, 2015)』

-『서울특별시 전문시방서(조경편, 2018)』

따로붙임  1. 사업대상지 위치도 및 현황사진 1부.

2. 공원시설 설치 및 관리 지침 1부(별송).

3. 사업 착공 및 준공보고 서식 1부.  끝.