문서번호	기전과-184
결재일자	2019.1.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		곽희영	01/11 신상식
협조
	주무관		문준호

2019년 경관조명 유지보수공사 시행계획

2019. 1.

성동도로사업소

(기전과)

2019년 경관조명 유지보수공사 시행계획

한강교량 및 고가차도 경관조명시설물의 완벽한 정비에 의한 체계적이고

지속적인 유지관리로 최적의 경관조명 조성에 만전을 기하고자 함.

▣ 추진방향

○ LED, 투광등 등 경관조명의 지속적 점검에 의한 유지관리 및 정비

○ 부점등 및 고장 적출 시 빠른 정비로 최적의 점등상태 유지

○ 영동대교(상류측) 경관조명 노후로 교체

▣ 사업개요

○ 사업대상 : 장안교, 겸재교, 광진교, 영동대교, 성수대교, 동호대교, 청담대교북단고가하부

○ 시설현황

구 분	장안교	겸재교	광진교	영동대교	성수대교	동호대교	청담대교 북단고가하부	총 계
조명등	1,096	340	145	1,502	858	622	706	5,269
분전함	1	1	2	2	2	3	3	14

○ 사업기간

- 연간단가계약 : 2019. 2 ~ 2019.12. 31

- 영동대교교체 : 2019. 2 ~ 2019. 6. 30

○ 사 업 비 : 360백만원

- 연간단가계약 : 100백만원(공사비: 80백만원, 자재비: 20백만원)

- 영동대교교체 : 260백만원(공사비: 220백만원, 자재비: 40백만원)

산출근거

공사비     : 1식 × 220,000,000원 =  220,000,000원

- LED-BAR : 97개 × 330,000원   =    32,010,000원

- SMPS     : 15개 × 300,000원   =     4,500,000원

- 컨트롤러   : 15개 × 232,000원   =     3,480,000원

○ 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 경관조명유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비.

▣ 추진내용

○ 경관조명시설 정비 및 유지관리

○ 등기구 세척으로 최적의 조명환경 조성

○ 민원사항 해소

○ 영동대교 경관조명 설비 정비 및 교체

▣ 추진방법

○ 연간단가공사

- 경미한사항 : 기전상황실 보수반 현장점검 보수

- 중대한사항 : 계약업체에 작업지시 정비완료 후 추후 정산

○ 영동대교 경관조명 교체공사

- 추진경위

▶ 한강교량 경관조명 점등확대 추진계획(시장방침 제49호-2016.03.07.)에

의거 하류측 경관조명을 교체하여 2016.10.01부터 점등을 실시하였으나,

▶ 예산부족으로 2016년도에 교체하지 못한 상류측 LED-Bar는 장시간 사용으로 당초 경관조명 연출(안) 보다 많이 흐린 색상으로 점등되고 있음.

▶ 이에 조도 상향을 요구하는 민원이 지속적으로 제기되고 있으며, 상류쪽도하류쪽 경관조명과 동일한 색상이 연출 되도록 하여 민원을 해소하고자 함.

- 전경사진

영동대교 경관조명 상류(좌) 및 하류(우) 비교사진

▣ 추진계획 및 행정사항

가. 연간단가계약공사

○ 공사

▷ 입찰방법 : 지역제한경쟁입찰(서울시)

▷ 입찰참가자격 및 제한규정

- 자격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허등록업체

- 제한 : 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

▷ 추진일정

-  ́19. 2.           : 공사발주 및 계약의뢰

-  ́19. 2. ~ ́19. 12  : 계약 및 공사시행

○ 관급자재

▷ 방법 : 조달구매 또는 수의계약 구매

▷ 추진일정

-  ́19. 2. ~ ́19. 12. : 년중 수시 구매

나. 영동대교 경관조명 교체공사

○ 공사

▷ 입찰방법 : 지역제한경쟁입찰(서울시)

▷ 입찰참가자격 및 제한규정

- 자격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허등록업체

- 제한 : 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

▷ 추진일정

-  ́19. 2.          : 공사발주 및 계약의뢰

-  ́19. 2. ~ ́19. 6  : 계약 및 공사시행

○ 관급자재

▷ 방법 : 조달구매

▷ 추진일정

-  ́19. 3. : 구매의뢰

-  ́19. 4. : 납품검수.  끝.