문서번호	계약심사과-12441
결재일자	2018.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
이용성		류종기	07/26 안호
협 조

서울애니메이션센터 건립공사(기본설계) 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2018. 7.

계약심사과

서울애니메이션센터 건립공사(기본설계)

설계경제성(VE) 심사 실행계획

도시기반시설본부(건축부)에서 시행하고 있는「서울애니메이션센터 건립공사」에 대해 심사 전담팀을 구성하고, 설계경제성 심사 실행계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ’18년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-579, ’18.1.11)

□ ’18년 상반기 설계VE 운영성과 및 내실화 계획(계약심사과-11658, ’18.7.11)

2		심사개요

□ 신청부서 : 도시기반시설본부(건축부)

□ 용  역  명 : 서울애니메이션센터 건립공사 기본설계 용역

□ 위    치 : 서울시 중구 소파로 126

□ 사업내용 : 교육연구, 문화 및 집회시설 건립

○ 사업규모 : 지하 4층/ 지상 3층, 연면적 15,900㎡

□ 공 사 비 : 51,900백만원

□ 용역기간 : ’17. 2. ~ ’19. 3.

□ 설계공정률 : 55%

3		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계·시공·유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

○ 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 유지관리부서 포함 16명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 - (CVS) 최영민 대표 자람기술(주) - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당	▸ 임장경 주무관 계약심사과	총괄 및 결과보고서 정리
팀원(5명)	▸ 외부 전문가 - (건축) 이상열 대표 건축사사무소하제 - (토질) 이종길 상무 (주)홍익기술단 - (조경) 장미란 상무 한국항만기술단 - (전기) 최윤숙 상무 건일엠이씨 - (기계) 조춘식 대표 삼인이에스	기능 분석, 기술 검토 아이디어 제안 아이디어 평가 제안서 작성 공사원가 분석, 정리 등
유지관리부서	▸ 임형준 사무관 문화융합경제과	유지관리 특이사항 설명
발주부서	▸ 김찬유 주무관 도기본(건축부)	사업설명, 제안서 검토
설계자(5명)	▸ 김승국 소장 공간종합건축사사무소 ▸ 분야별 설계자	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성(VE) 심사 검토회의 세부일정

차수	일 시	내 용
1일차	’18.8.13(월) 10:00~17:00	- 사업설명, 현장확인, 성능평가, 기능분석 ‣ 장소 : 계약심사과 회의실(9층)
2일차	’18.8.14(화) 10:00~17:00	- 1차 검토회의 : 대안 제시 및 구체화 등 ‣ 장소 : 계약심사과 회의실(9층)
3일차	’18.8.22(수) 10:00~17:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가·분석, 채택 등 ‣ 장소 : 계약심사과 회의실(9층)
-	’18.8.24(금) 18:00 까지	- 심사결과(채택여부 반영) 통보

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		검토 절차		업무 내용
계획수립		’18.7.25		설계경제성 심사 신청 (사업부서)		▸심사 신청서 접수
		’18.7.26		설계경제성 심사 계획수립 (VE담당)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸설계VE팀 구성
설계경제성심사운영		’18.8.13 ~ ’18.8.22 (6~15일차)		설계경제성 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE 전담팀)		▸자료 사전검토 ▸현장 확인 및 사업설명 ▸1,2차 검토회의 - 아이디어제시, 결과이행 회의 - 대안구체화 및 분석·평가
		’18.8.24 (17일차)		제안 채택결과서 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸심사결과 통보
		’18.8.25 ~ ’18.8.30 (18~23일차)		심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸설계경제성 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’18.8.31 (24일차)		심사결과 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸심사결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 10,055천원

○ 외부전문가 수당 : 9,755천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,449천원(2,449천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 5,660천원(1,132천원 × 5명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 1,646천원(823천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 300천원

□ 예산과목

○ 신청부서(도기본(건축부))에서 위원수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

5		향후계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보 --------------  ’18.8.31.

붙 임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.