문서번호	급수운영과-2897
결재일자	2019.2.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
박종대	이상환	송근호		02/08 이구석
협 조
	시설관리과장		천성훈
	시설관리팀장		박종일
	주무관		노운학

2019년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

2019. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2019년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 관련근거

○ 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 변경(급수운영과-23267호, ’16.9.20)

○ ’19년 소블록 배급수관망 개선사업 계획알림(누수방지과-1037호, ’19.1.29)

□ 추진기간: 2019년 3월 ~ 10월(연차별 정비, 2014년 ~ 2022년)

□ 사 업 비: 266백만원

□ 정비대상: 36개소(L=484m)

□ 사업목적

○ 단일배관 이중화로 무단수 급수체계 구축

○ 단절 구간을 순환관망으로 형성하여 깨끗한 아리수 공급

《 단일배관 이중화 》

《 단절관 순환관망 》

	➡

Ⅱ		추 진 계 획

□ 추진실적 및 계획

구 분	총 계	추진실적						추진계획
		소 계	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	소 계	’19년	’20년 이후
사업비(백만원)	4,176	983	184	263	119	247	170	3,193	266	2,927
대 상(개소)	151	66	10	2	6	22	26	85	36	49
연 장 (㎞)	5.93	1.79	0.3	0.4	0.36	0.43	0.30	4.14	0.48	3.66

□ 연차별 추진계획

구 분		계	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
계	사업비 (백만원)	3,193	266	1,210	245	1,472
	대상(건)	85	36	16	14	19
	연장(㎞)	4.14	0.48	1.13	0.47	2.06
단일배관 이 중 화	사업비 (백만원)	1,019		270		749
	대상(건)	4		1		3
	연장(㎞)	1.28		0.2		1.08
단 절 관 정 비	사업비 (백만원)	2,174	266	940	245	723
	대상(건)	81	36	15	14	16
	연장(㎞)	2.86	0.48	0.93	0.47	0.98

□ 2019년 추진계획

○ 소블록 배급수관망 개선대상(배정예산: 266백만원)

- 단절관 순환관망: 36건(급수운영과 6건, 시설관리과 30건)

- 단일배관 이중화: 해당없음

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록 배급수관망 개선)

○ 과별 추진계획

구 분		총 계	급수운영과			시설관리과
			소 계	광 진 구	성 동 구	소계	동대문구	중 랑 구
단절관 정 비	사업비 (백만원)	266	89	18	71	177	117	60
	대 상 (개소)	36	6	2	4	30	28	2
	연 장 (m)	484	131	36	95	353	213	140

○ 사업추진 방법

	공사 시행 방법
- 공사건별 도급액 20백만원 이상: 배급수관 정비사업에 포함 발주 ⟹ 서울시설공단 감독 - 공사건별 도급액 20백만원 이하: 연간단가계약 공사로 시행 ⟹ 상수도공사(단가계약) 계약된 건설사업관리용역 감리

- 미정비 대상: 2019년 예산 범위에서 사업 추진 검토

- 사업추진 변경 : 굴착통제 등 특정 사유로 당해년도 추진 불가

•신규 또는 기존 대상 변경 등 중장기 계획 변경 수립 후 본부 보고

- 정비대상 제외 : 사업소 별 추진불가 사유 서면 보고 후 제외

- 지장물 등으로 공사불가 시 대상을 변경하여 100% 목표달성 추진

Ⅱ		행 정 사 항

○ 추진실적 보고: 매월 10일, 본부 누수방지과

○ 현장조사 실시(지역 담당): ’19. 2. ~ 3.

○ 도로굴착 승인요청: ’19. 3. ~ 4.

○ 공사착공 및 완료: ’19. 3. ~ 10.

붙임 1. 관련 공문[소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(본부)] 1부.

2. ’19년 소블록 배급수관망 정비대상내역 1부.

3. ’18년 소블록 배급수관망 정비내역 1부. 끝.